문서번호	토목부-19949
결재일자	2019.11.4.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
주무관	광역도로과장	토목부장		시설국장
이성열	박일연	김용제		11/04 김승원
협 조

창덕궁 앞 도성한복판 주요가로 개선사업 준공기한 연기 검토보고

2019. 11.

도시기반시설본부

(토  목  부)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	□	■
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사 등	□	■
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 분석 등	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등 - (온실가스 감축) 건물 및 수송 분야 에너지사용 절감방법, 폐기물 발생 억제 대책 등	□	■
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	■	□
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	□	■
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등	□	■
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	■	□

창덕궁 앞 도성한복판 주요가로 개선사업

준공기한 연기 검토보고

『창덕궁 앞 도성한복판 주요가로 개선사업』의 준공기한이 도래함에 따른 절대공기 부족으로 공기 연장이 필요하여 준공기한 연기 검토 보고임.

Ⅰ		관련근거

□ 공사계약일반조건 제8절2(계약기간의 연장)

□ 공사기간 연장검토 보고 건(창덕궁감 2019-163호, ’19.10.31.)

□ 총괄 및 1차분 공사기간 변경요청(창덕궁 2019-48호, ’19.10.30)

Ⅱ		공사개요

□ 공 사 명: 창덕궁 앞 도성한복판 주요가로 개선사업

□ 위    치: 돈화문로 외 5개 주요가로

□ 규    모: 도로정비 연장 2,400m

□ 공사기간: *****************************************************

□ 도 급 비: ***************************

□ 시공사/감리단 : *****************************

Ⅲ		검토내용

□ 준공기한 연기사유

*******************************************************

*****************************************************

***********************************************

****************************************************

****************************

□ 감리단 의견

○ 상기 항목별 사유에 대해 검토한 결과, 부득이한 사정으로 공기를 연장하여야 할 것으로 판단되며,

○ 현장의 작업여건(하수관로 개량 병행작업 간섭) 고려, 잔여공사에 대한 공기검토 결과  약 8개월의 공사기간을 연장하여 품질 및 안전 관리를 도모함이 합당함.

□ 준공기한 변경현황

구 분	당 초	변 경	증·감	비 고
총차	’******************** ******	’******************** ******	*******	금 액 변경없음
1차	’*******************. ******	’******************** ******	*******	금 액 변경없음

Ⅳ		조치계획

□ 자치구 요구사항 반영에 따른 공사중지 등에 대한 준공기한 연기사유를 검토한 결과 적정하다고 판단되며,

□ 절대공기 부족으로 당초 준공기한까지 공사완료가 불가한 바, 감리단 검토의견과 같이 준공기한을 연기하고자 함.

□ ******************

따로붙임  1. 감리단 검토의견서 1부.

2. 시공사 관련 서류 1부.

3. 수정예정공정표 1부.  끝.