문서번호	경제정책과-16609
결재일자	2019.11.4.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

		시 민
주무관	콘텐츠산업팀장	경제정책과장
이영민	이혜진	11/04 이방일

서울시네마테크 건립준비위원회 개최계획

2019. 11.

경제정책실

(경제정책과)

서울시네마테크 건립준비위원회 개최계획

서울시네마테크(가칭) 건립을 체계적으로 준비하기 위해 건립준비위원회를 개최하고자 함

1		사 업 개 요

□ 서울시네마테크 개요

○ 사업목적 : 독립/예술/비상업영화 등의 전문 상영관 운영을 통해 영상산업의 저변과 다양성을 확보하는 거점공간 조성

○ 사업기간 : ’17. 3. ~ ‘21. 9.

○ 사업위치 : 중구 마른내로 38(중구 초동 공영주차장)

○ 사업규모 : 연면적 약 4,800㎡, 지하3층~지상10층(부지면적 : 804.1㎡)

○ 총사업비 : 22,464백만원(국비 1,182백만원, 시비 21,282백만원)

○ 공간구성 : 영화 상영관(3개), 미디어센터, 아카이브, 전시실 등

□ 건립준비위원회 개요

○ 구성배경 : 설계단계에서부터 영화계가 의견을 내고 과정에 참여해 영화계가 만족할 수 있는 시설이 되도록 추진

○ 운영기간 : ’18. 9. ~ 시네마테크 개관 전까지

○ 구성인원 : 15명 ※ 위원장 고영재(한국독립영화협회 이사장)

- 영화계 추천(12), 시의회(1), 서울시(경제정책실장, 市공공건축가)

○ 운영방식

- 시네마테크 건립공정 진행상황 점검을 위한 전체회의 개최

- 실무위원회 운영을 통한 세부사항 심층 논의로 운영의 효율성 제고

2		그간의 추진경위

○ 서울시네마테크 설계 착수	: ’18. 5.

○ 건립준비위원회 구성 및 제1차 회의 개최	: ’18. 9.

○ 실무위원회 1,2차회의 개최	: ’18.10.

- 외관디자인 검토, 스크린 크기, 자료보관실 크기, 방음필요사항 등 자문

○ 실무위원회 3차회의 개최	: ’18.11.

- 쾌적한 환경을 위한 극장좌석 수, 적정계단 열 수, 운영사무실 위치 등 자문

○ 실무위원회 4차회의 개최	: ’18.12.

- 극장 좌석배열 조정, 비상계단/휴게실 위치 조정, 녹음실 분리설치 등 자문

○ 계획설계 완료 및 중간설계 착수	: ’18.12.

○ 실무위원회 5차회의 개최(장애인단체 참여)	: ’19. 1.

- 자료열람실 설계수정, 장애인석 추가확보(기존 7석 → 변경 10석),
BF인증요건 충족요건 관련 자문

○ 중간설계 완료 및 실시설계 착수	: ’19. 5.

○ 서울시네마테크 운영 컨설팅 용역 발주	: ’19. 7.

○ 실시설계 준공	: ’19.10.

3		세부 개최계획

□ 일    시 : ’19. 11. 4.(월) 14:00 ~ 16:00

□ 장    소 : 무교별관 7층 대회의실

□ 참 석 자 : 20명 내외

○ 건립준비위원(영화계 추천) : 고영재 위원장 등 6명

○ 서울시 : 경제정책실장, 경제기획관, 경제정책과장

○ 기  타 : (사)한국영화학회

□ 회의안건 : 설계준공 및 향후일정 설명, 운영관련 자문 등

□ 진행순서

시 간		주 요 내 용	비 고
14:00~14:05	5‘	○ 참석자 소개 및 회의 진행 안내	콘텐츠산업팀장
14:05~14:15	10‘	○ 인사말씀	경제정책실장 고영재 위원장
14:15~14:35	20‘	○ 서울시네마테크 설계준공 보고 및 향후 추진일정 보고 ○ 시네마테크 운영관련 검토자료 보고	경제정책과장
14:35~14:55	20‘	○ 서울시네마테크 운영 컨설팅 용역 주요 연구내용 설명	(사)한국영화학회
14:55~15:55	60‘	○ 현안사항 논의	위원
15:55~16:00	5‘	○ 마무리말씀	고영재 위원장

4		행정사항 및 향후계획

□ 행정사항

○ 소요예산 : 1,080천원

- 위원 참석수당	: 900천원 = 150천원 × 6명

- 다과 구입비	: 180천원 = 9천원 × 20명

○ 예산과목 : 경제정책실 경제정책과, 활력이 넘치는 경제환경구축, 영상산업 육성지원, 서울시 시네마테크 건립, 사무관리비(201-01)

□ 향후계획

○ 서울시네마테크 공사 발주	: ’19. 11.

○ 서울시네마테크 운영관련 공청회 개최	: ’19. 12.

붙임 : 서울시네마테크 건립준비위원회 위원 명단 1부.  끝.

연번

**

**

**

*****

1

***

*****

*

***

***

****

*******************

2

*

***

***

****

************

3

*

***

***

****

**************************

4

***

***

****

************

5

*

***

***

****

*****************

**********************

6

*

***

***

****

************************

7

*

***

***

****

***********************

8

*

***

***

****

*******************

9

*

***

***

****

*************************

10

*

***

***

****

******************

*******************************

11

*

***

***

****

************************

12

*

***

***

****

********************

13

***

****

***

***

****

**********************

14

***

****

*

***

***

****

******************

15

*

***

***

****

***********************

**************

붙임	서울시네마테크 건립준비위원회 위원 명단 (*가나다 순)