문서번호	공원조성과-13710
결재일자	2019.11.4.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
주무관	주제공원팀장	공원조성과장		푸른도시국장
이병래	박철수	유영봉		전결 11/04 최윤종
협 조	공원녹지정책과장		하재호
	공원보상준비팀장		박수미
	실효대응준비팀장		이용남
	생활공원팀장		김대성
	공원녹지기획팀장		한정훈

동네뒷산 공원조성사업(관악산도시자연공원 캠핑장)

실시계획인가 무효 소송(패소) 관련 조치계획 보고

2019. 11.

푸른도시국

(공원조성과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
성별분리통계	● 성별분리통계 작성여부를 검토하였습니까? 예) 인적통계 남·여 구분, 수혜집단의 남·여 구분 등	□	■
일자리	● 일자리 창출 효과 및 일자리 수를 검토하였습니까? 예) 직·간접 채용, 취업알선, 전문인력양성, 창업지원 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업 홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
정 책 영문화	● 정책 영문화 및 해외홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 영문 제목‧요약, 해외 언론 보도, 외국어 홈페이지 등	□	■
바른 우리말	● 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까? 예) 스페이스, 플랜, 앵커시설, 거버넌스, 인큐베이팅, 매칭 등	■	□
결재문서공개	● 공개 여부를 “비공개”로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? 예) 정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호	■	□

동네뒷산 공원조성사업(관악산도시자연공원 캠핑장)

실시계획인가 무효 소송(패소) 관련 조치계획 보고

· ****************************************************************

※ 관련문서 : 관악구 공원녹지과-19900호(2019.8.13.) 캠핑장 추진 관련 의견제출

		사 업 개 요

사 업 명 : 동네뒷산 공원조성사업(관악산도시자연공원 캠핑장)

위    치 : 관악구 봉천동 256-1번지 일대

사업기간 : 2017. 4. ~ 2019. 8.

사업예산 : 총 10,428백만원(‘17년 2,670, ’18년 7,122, ‘19년 636)

사업규모 : 14,347㎡

필 지	봉천동 산41-4	봉천동 256-1	봉천동 255	봉천동 738-337
지적면적	59,198	1,696	3,702	645
편입면적	8,304	1,696	3,702	645
소 유 주 (2017.4. 기준)	서울대	서울대	보성선씨 매화정종중	서울시

		소 송 개 요

사건번호 : ***********

사 건 명 : **************************

원고/피고 : *************

진행사항 : ************************************

패소사유 : 캠핑장 부지 보상을 위해 서울대 소유 2필지(봉천동 산41-4번지 · 256-1번지, 10,000㎡)에 대해 실시계획인가 고시(2017.5.25.)하였으나, ****************************************

		추 진 경 위

2017.04.03. : 관악산 캠핑장 조성계획 수립(관악구)

2017.05.25. : 실시계획인가 고시(동네뒷산 조성사업)

2018.01.09. : *******

2018.07.19. : ************

2019.06.27. : ************

2019.07.12. : ***********************

2019.07.25. : 합동 회의(우리시, 관악구)

2019.08.13. : 캠핑장 추진대책 제출(관악구 → 우리시)

		조 치 계 획

향후 관악산 캠핑장 조성사업 추진 방안(관악구 의견 반영)

- 단 기 적 : *************************************           ***************

- 중 · 장기적 : ************************************

**********

소송 패소 토지 장기미집행 도시공원 보상 추진

******	지적면적 (㎡)	캠핑장 사업면적(㎡)	**** *******	********** *******	**** *******
*********	59,198	8,304	******	*****	*****
*********	1,696	1,696	*****	*	*****

- ********************************************************************************************

- ************************************************************************************************************************************************

- **********************************************************************************************

⇒ **************************************************************************************

※ 단, 보상 시행시 실시계획인가 등 관련 절차 이행 및 자료 준비 철저토록 감독

※ 2019 보상 대상지 중 ********* 보상 추진

******************************************

- ***************************************************************************************************************

*********************************************************

공탁금 세외수입 조치 및 토지 소유권 등기 이전

[대상지 : 봉천동 256-1번지(1,696㎡), 공탁금 ********************)]

- 공탁금 세외수입 : 공탁처인 서울중앙지방법원으로부터 공탁금을 환수(부서 환수계좌 신규 개설 필요)받아 세외수입 조치

- 토지 소유권 등기 이전 : 서울시 → 서울대

캠핑장 사업 잔여예산 활용 방안

- 잔여예산 : ***************************************************

- 잔여예산 활용 방안

*****	**** **********	**** ****	**
*****	******************* **********************	*********	**** **** ******

※ *******************************************************************************************************************************

		행 정 사 항

관악구 조치사항

- **************************

- ***********************************************

· ***********************************

- *******************************************

- ***********************************************

- **********************************************

우리시 조치사항

- *********************************************************************************

- *****************************************************************************

- **************

붙 임   1. 위치도 및 보상계획도 1부

2. 소송 패소 보고 1부

3. 합동 회의결과 1부

4. 관악구 의견 제출 공문 1부

5. 관악구 추진대책 방침 1부

6. 법률자문 결과 보고 1부.  끝.