문서번호	기반시설과-3641
결재일자	2019.11.4.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		기반시설과장	시설부장
정창수		라철흠	11/04 전영주
협조

『신마포나들목 신설공사』

강변북로 포장 복구구간 연장에 대한 보고

2019. 11.

한강사업본부

(시  설  부)

『신마포나들목 신설공사』

강변북로 포장 복구구간 연장에 대한 실정보고

『신마포나들목 신설공사』와 관련하여 강변북로 포장 복구구간 연장에 대한  검토보고 드림

□ 공사개요

❍ 공 사 명 : 신마포나들목 신설공사

❍ 규    모 : 보행전용 나들목 B=5m, H=3.5m, L=51.5m

❍ 총공사비 : 4,728백만원

❍ 기    간 : ‘17.08.30.~’19.11.17.

❍ 시 공 사/감 리 단 : 우탑건설(주)/(주)삼안 외 2개사

□ 실정보고 사유

❍ 관련근거

- 신마포감 2019-258호(2019.11.01.)

❍ 사    유 : 주강변북로의 포장구간 변경 및 비상도록 포장

- 신마포나들목 신설공사로 인하여 침하가 발생한 강변북로의 포장 복구에 대하여 포장 복구 범위를 검토하고 노후화한 비상주차대에 대한 포장 유지보수 방안에 대한 적정성을 검토하기 위함.

□ 보고내용

❍ 포장범위 검토

- 굴착 깊이에 따른 지반 영향 범위 검토

통로 박스 단면도	추진기지 평면도

- 굴착 영향 예상 범위

10.12 x 1.5 + 12.0 + 10.12 x 1.5 = 42.35m

- 포장 범위 결정

42.35 + 5 @ 2 (포장 평탄성 조정)= 52.35 → 50.0m

❍ 계획고 조정 검토

❍ 비상주차대 보수

- 포장 파손상태가 심하며 강우시 물고임 발생

- L형측구 철거 및 신설, 가드레일 교체

❍ 교통안전시설 반영

- 공사 구간의 원활한 교통 소통 및 교통사고 방지를 위해 방호벽, 점멸등 및 공사안내간판 추가 반영

❍ 주요 수량 증·감 현황

(단위 : 천원)

공 종	규격	단위	당초	변경	증·감	비고
아스팔트포장절단		m	80	237	157
아스팔트포장깨기	기계	㎥	31	-	-31
아스팔트포장절삭	T=5cm	㎥	31	83	52
아스팔트표층 포설	T=8cm	㎡	386	1,179	793
아스팔트콘크리트	#78표층용	ton	74	221	147
화강암 경계석	200×250×1000	m	-	80	80
기존 경계석철거	30cm미만	m	-	80	80
공사안내 입간판	900×1800,고휘도	ea	-	2	2
PE방호벽	1200×600×900	ea	-	42	42
가드레일	토공용	경간	-	11	11

❍ 주요 수량 증·감 현황

(단위 : 천원)

공 종	당 초	변 경	증·감	비 고
직 접 공 사 비	9,161	35,391	26,230
제 경 비	2,139	9,509	7,370
공 급 가 액	11,300	44,900	33,600
부 가 가 치 세	1,130	4,490	3,360
도 급 액	12,430	49,390	36,960
관 급 자 재 비	-	-	-
총 공 사 비	12,430	49,390	36,960

- 신규단가 검토

공 종	규 격	단위	적 용	적용 단가	비 고
PE방호벽	1200×600×900	ea	물가자료 적용	125,782	신규비목

- 신규비목으로 낙찰율 (86.746%) 적용

□ 검토의견

❍ 책임기술자 검토의견

- 상기와 같이 강변북로 포장복구 구간에 대해 검토한 결과 추진기지 굴착 및 추진강관 시공에 따른 강변북로 침하 영향 범위를 고려할 경우 포장복구 연장을 당초 24.0m → 50.0m로 변경하고,

- 노후화한 비상주차대에 대한 유지보수를 실시함이 타당할 것으로 사료됨.

□ 조치의견

❍ 감리단의 검토의견과 같이 강변북로 포장복구 구간을 연장 및 비상도로에 대한 아스콘 덧씌우기 하는 것으로 변경 시공하고 반영하고자 함.

붙  임 : 1) 감리단 공문 1부.

2) 감리단 검토의견서 1부. 끝.