＂상수도사업본부 발족 30년, 수돗물 통수 111년, 믿고 마시는 아리수!＂
	강동수도사업소
수신	행정지원과장
(경유)
제목	변경계약 의뢰(가락초 외 24개소 아리수 음수대 배관 설치공사)

우리 사업소에서 시행하고 있는 「가락초 외 24개소 아리수 음수대 배관 설치공사」에 대하여 아래와 같이 설계변경 시행하고 변경 계약 의뢰하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 공사명: 가락초 외 24개소 아리수 음수대 배관 설치공사

나. 공사개요 - 당초: D=15㎜, L=519m

- 변경: D=15㎜, L=601m

다. 공사기간: 2019. 6. 25.～2019. 11. 6.

라. 계약상대자: *************

마. 계약금액

(단위: 원)

****	****	****	****
***	**********	**********	***********

바. 설계변경 사유: 음수대 설치 대상 기관 추가로 인한 계약물량 증가 및 신공종 발생

사. 예산과목

***************************************************

붙임  1. 설계변경 시랭 공문 및 관련 문서 각 1부.

2. 합의서 1부.  끝.

	급수운영과장
주무관	최박		급수운영팀장	代곽미숙		급수운영과장	11/04 김태형
협조자
시행	급수운영과-17376	(		)	접수		(		)
우			/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	3146-5150	/전송		/	chstar@seoul.go.kr	/	부분공개(5)