투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시한강사업본부
수신	총무과장
(경유)
제목	설계변경 시행 및 계약의뢰-한강준설(저수로) 정비공사

우리 본부에서 시행중인 『한강준설(저수로) 정비공사』에 대하여 아래와 같이 설계변경(정산)을 시행하고 계약의뢰 하고자 합니다.

가. 공 사 명 : 한강준설(저수로) 정비공사

나. 계약기간 : 2019.4.1. ∼ 2019.11.26.

다. 도 급 액 : 2,275,989,000원

라. 시 공 사 : 관악산업(주)

마. 감 리 사 : 주식회사 신승엔지니어링

바. 변경내용                                                  (단위:원)

구 분	정산			비고
	당 초	변 경	증·감
도 급 비	2,275,989,000	2,275,989,000	-

사. 설계변경사유

- 지역별 준설물량 증·감(서울함, 동작대교 주변, 한강갑문  신규발생)

- 준설토 사토 운반량 조정

아. 예산과목

- 한강공원관리및운영, 한강하천시설관리, 한강저수로정비, 시설비(401-01, 시비)

붙임 :  1. 내부 방침서 1부.

2. 건설사업관리자 검토 의견서 1부

3. 변경도서(정산). 1부.

4. 검증확인서 1부.  끝.

	치수과장
주무관	방호익		치수과장	11/04 손창열
협조자
시행	치수과-3872	(		)	접수		(		)
우	04770	서울시 성동구 강변북로 257(성수동1가 642-25)	/
전화		/전송		/		/	대시민공개