투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시중랑물재생센터
수신자	관리과장
(경유)
제 목	설계변경 계약의뢰(분뇨처리장 농축기 슬러지이송펌프 제조구매설치)

1. 시설보수과-6013(2019.11.4.)호 관련입니다.

2. 우리센터 내 「분뇨처리장 농축기 슬러지이송펌프 제조구매 설치」사업 관련하여 물량 증가 등으로 계약변경 사항이 발생됨에 따라 아래와 같이 설계변경 계약의뢰하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 건    명 : 분뇨처리장 농축기 슬러지이송펌프 제조구매설치

나. 계약금액 : ************

다. 계약업체 : 주식회사 지이티에스 ******

라. 계약기간 : 2019.10.11. ~ 2019.12.13.

마. 변경사유 :

- 기존 스크류펌프에서 모노펌프로 변경 시, 약품배관의 위치 변경에 따라 약품혼화조

각각에 교반기 설치가 필요함. 이에 따른 물량증가로 해당사업의 계약금액 변경시행.

구 분	당 초	변 경	증 감	비 고
총 액	***********	***********	*************

붙임  1. 설계변경 방침서 1부.

2. 설계변경 내역서 1부.

3. 설계변경 합의서 1부.  끝.

	시설보수과장
주무관	박영욱		주무관	조연상		시설보수과장	11/04 임준빈
협조자
시행	시설보수과-6024	(		)	접수		(		)
우	04809	서울특별시 성동구 자동차시장3길 64 중랑물재생센터	/	www.seoul.go.kr
전화		/전송	02-2211-2579	/		/	부분공개(5)