투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서부공원녹지사업소
수신자	내부결재
(경유)
제 목	월드컵공원장미원조성사업 준공기한 연기 시행

공원운영과-15017(2019.11.04.)호와 관련 월드컵공원장미원조성사업에 대해 아래와 같이 준공기한을 연장하고자 합니다.

1. 공 사 명 : 월드컵공원 장미원 조성사업

2. 계 약 자 : ㈜충림종합기술 대표 박복조

서울 송파구 올림픽로35가길 11(T: 02-406-2987)

3. 계약금액 : 금249,017,870원(금이억사천구백일만칠천팔백칠십원)

4. 공사기간 : ’19. 08. 13.~’19. 11. 10.

5. 계약변경 사항

구 분	당 초	변 경	증 감
공사기간	’19. 08. 13.~’19. 11. 10.	’19. 08. 13.~’19. 11. 30.	20일 연장

- 연기사유귀책소재: 서부공원녹지사업소

- 지체상금 미부과여부: 미부과

6. 공기연장사유 : 서울억새축제 및 공원이용성수기 시민이용편의를 고려한 10월 한달간 공사 중단으로 인한 지연일수 발생

7. 예산과목 : 서부공원녹지사업소 공원운영과, 세계적인환경생태테마공원육성, 산하공원운영, 월드컵공원시설물보수정비, 시설비 및  부대비, 시설비

붙임 1. 검토보고서 1부.

2. 연기의뢰서 1부.  끝.

주무관	김은희		녹지조경팀장	고봉채		공원운영과장	배효성		서부공원녹지사업소장	11/05 남길순
협조자	재무팀장	정동철
시행	공원운영과-15048	(		)	접수		(		)
우	03901	서울특별시 마포구 월드컵로 243-60	/	http://worldcuppark.seoul.go.kr/
전화	02-300-5544	/전송	02-300-5527	/	eun2@seoul.go.kr	/	대시민공개