문서번호	정수시설과-12000
결재일자	2019.11.5.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		정수시설과장	암사아리수정수센터소장
신대중		代김희수	11/05 유성종
협 조
	주무관			김희수

『제2정수장 응집지 유입수문 수문권양기 전기공사』

설계변경 검토보고

2019. 11.

암사아리수정수센터

[정 수 시 설 과]

『제2정수장 응집지 유입수문 수문권양기 전기공사』

설계변경 검토보고

우리센터에서 시행중인 ‘제2정수장 응집지 유입수문 수문권양기 전기공사’에 대하여 물량증감 및 제경비 정산에 따른 설계변경 보고임.

□ 공사개요

○ 공 사 명: 제2정수장 응집지 유입수문 수문권양기 전기공사

○ 공사내용: 2정수장 응집지 유입수문 수문권양기 설치에 따른 전기공사

○ 계약금액: 금25,084,100원

○ 공사기간: 2019.09.11.~2019.11.09.

○ 계 약 자: ㈜영이엔엘 대표 박영락

□ 설계변경사유

○ 물량 증·감 및 제경비 정산에 따른 설계변경

□ 설계변경

○ 공사비 변경현황

구 분	변경전	변경후	비 고
총공사비	25,084,100	25,084,100
공급가액	22,803,728	22,803,728
부가세	2,280,372	2,280,372

○ 물량변경내용

공 정	규 격	물량변경	비 고
배관용 홈파기	82㎜ 이하	20 → 27M	증) 7M
CABLE TRAY COVER	200W	0 → 28개	증) 28개
1종금속제가요전선관	28㎟ 고장력	0 → 17M	증) 40

○ 제경비정산: 1,030,018원 감액(건강보험료, 연금보험료, 노인장기요양보험)

□ 조치의견

○ 상기와 같이 물량 및 제경비 정산에 대하여 설계변경을 시행코자 함.

붙임: 1. 설계변경 내역서 1부.

2. 설계변경합의서 1부. 끝.