투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신자	총무부장
(경유)
제 목	준공기한 연기 의뢰(창덕궁 앞 도성한복판 주요가로 개선사업)

우리 부에서 시행 중인「창덕궁 앞 도성한복판 주요가로 개선사업」에 대하여 아래와 같이 준공기한 연기를 의뢰하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

1. 공 사 명 : 창덕궁 앞 도성한복판 주요가로 개선사업

2. 위    치 : 종로구 돈화문로 외 5개소

3. 공사규모 : 가로개선(연장 2,400m, 폭 1.5~22m)

4. 계 약 자 : 다이치종합건설(주) 외 1개사

5. 계약금액 : 총차 – 금6,725,138,000원(금육십칠억이천오백일십삼만팔천원)

1차 – 금5,800,000,000원(금오십팔억원)

6. 준공기한 변경내역

구 분	당 초	변 경	증·감	비 고
**	********************* ******	********************* ******	*******	****** ****
**	********************* ******	********************* ******	*******	****** ****

7. 귀책소재 및 연기사유

- 연기에 따른 귀책소재 : 도급계약자 귀책사유 없음

- 지체상금 부과여부 : 미부과

- 연기사유 : 자치구 요구사항 반영에 따른 공사중지 및 하수관로 정비공사 병행에 따른 간섭 등으로 인한 공기지연으로 현 준공기한 내 사업완수 불가

따라붙임 1. 준공기한 연기 검토보고서(방침서) 1부.

2. 준공기한 연기 의뢰서 1부.

3. 감리단 및 시공사 관련서류 1부.

4. 합의각서 1부.  끝.

	토목부장
주무관	이성열		광역도로과장	박일연		토목부장	11/05 김용제
협조자
시행	토목부-20023	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8 프리미엄 플라이스빌딩 12층	/	http://infra.seoul.go.kr
전화	02-3708-2559	/전송	02-3708-2599	/	san730@seoul.go.kr	/	부분공개(5)