＂상수도사업본부 발족 30년, 수돗물 통수 111년, 믿고 마시는 아리수!＂
	암사아리수정수센터
수신자	내부결재
(경유)
제 목	설계변경 시행(제2정수장 응집지 유입수문 수문권양기 전기공사)

1. 우리정수센터에서 시행중인 『제2정수장 응집지 유입수문 수문권양기 전기공사』에 대하여 아래와 같이 설계변경을 시행코자 합니다.

가. 공 사 명: 제2정수장 응집지 유입수문 수문권양기 전기공사

나. 공사기간: 2019.09.11.~2019.11.09.

다. 계약금액: ***************************

라. 도 급 자: ************

마. 하자기간: 준공검사일로부터 1년

바. 변경사유: 물량변경 및 제경비정산

사. 설계변경내역

구 분	변경전	변경후	증·감
총공사비	25,084,100	25,084,100	-
공급가액	22,803,728	22,803,728	-
부가세	2,280,372	2,280,372	-

아. 예산과목: 자본적지출, 유형자산취득, 기계장치, 시설비및부대비, 시설비

(2정수장 응집지 유입수문 전동화)

붙임문서 : 1. 방침서 1부.

2. 설계변경내역서 1부.

3. 설계변경합의서 1부. 끝.

주무관	신대중		정수시설과장	代김희수		암사아리수정수센터소장	11/06 代김성철
협조자	주무관	김희수		주무관	변민용
시행	정수시설과-12046	(		)	접수		(		)
우	05205	서울특별시 강동구 아리수로 131 암사아리수정수센터 (암사동)	/
전화	02-3146-5774	/전송	02-3146-5707	/	ninjagubooki@seoul.go.kr	/	부분공개(5)