문서번호	설비부-17349
결재일자	2019.11.6.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		녹색성장과장	설비부장
정찬교		오삼록	11/06 임정규
협조

『남산예장자락 재생사업 전기공사·통신공사』

공사 준공기한 연기 검토보고

2019. 11.

도시기반시설본부

(설 비 부)

『남산예장자락 재생사업 전기공사·통신공사』

공사 준공기한 연기 검토보고

「남산예장자락 재생사업」사업기간 조정(`19.12⇒`20.12) 방침에 따라 전기공사 및 통신공사 준공기한 연기하고자 함.

1		공사개요

□  공 사 명 : 남산예장자락 재생사업 전기공사, 통신공사

□  규    모 : 지하주차장 5,679m2, 부대시설 1,532m2

□  공사기간 : `17.08.01~`19.12.31

□  감 리 사 : ㈜동성엔지니어링

□  시 공 사 : ************************

□  공정율 : 26%(지하1층 벽체 매입배관 진행)

2		관련근거

□  *******************************************       ***************

3		준공기한 연기내용

□  공사기간 연기 내용(총차)

품 명	계 약 자	계약금액	준공기한
			당 초	변 경
전기공사	*********	**************	`19.12.31	`21.12.31
통신공사	*******	************	"	"

□  연기사유 : 선행공종(토목) 사업기간 연장에 따른 연기

□  귀책소재 : 서울특별시 도시기반시설본부

4		보고자 조치의견

□  주공사의 사업기간 연기 방침에 따라 계약부서에 전기공사, 통신

공사 준공기한 연기 의뢰하고자 함.

붙 임 : 1)사업계획 연기 방침 1부.

2)감리단 공문 2부. 끝.