문서번호	치수과-15606
결재일자	2019.11.6.
공개여부	부분공개
방침번호

주무관		하수계획팀장		치수과장		안전건설교통국장
김재혁		백원기		민병기		11/06 손경철
협조
	재무과장		홍명안
	계약팀장		양영종

★ ◉

「뚝섬로 358 주변 사각형거 보수보강공사」

설계변경(정산) 검토보고

2019. 11.

성   동   구

(치 수 과)

사 전  검 토 사 항

::: 해당사항에 ☑ 표시하시기 바랍니다.
항 목		검 토 여 부
사업구분		신규사업 □ 공약(약속)사업 □ 계속사업 □ 인센티브/공모사업 □
소통분야 고려사항		●	구민		:		유 □ ( ) 무 ☑
		●	전문가		:		유 □ ( ) 무 ☑
		●	이해당사자		:		유 □ ( ) 무 ☑
여성친화 도시		성 평 등 □ 안 전·편 의 □ 가 족 · 공 동 체 회 복 □ 여 성 참 여 □
기타 고려사항		일 자 리 □ 환경영향 □ 안 전 ☑ 유지비용 ☑ 바른 공공언어 □
		성 인 지 □ 취약계층 □ 장 애 인 □ 디 자 인 □ 갈등발생 요인 □
타자원 활용		●	중앙부처	:		유 □ ( ) 무 ☑
		●	서울시	:		유 ☑ ( 시비 재배정사업 ) 무 □
		●	기업	:		유 □ ( ) 무 ☑
		●	민간단체	:		유 □ ( ) 무 ☑
언론홍보 계획		기획보도 □ 보도자료 □ SDTV □ 성동뉴스레터 □ 성동구소식지 □
		기 고 문 □ 전자행정서비스 □ S N S □ 기타 (리플릿 등) □ 없 음 ☑
	● 홍 보 제 목 :
	● 중점 홍보사항 - -
	※ 우리 구만의 차별화된 사업내역과 중점 부각하여 홍보할 사항을 중심으로 ‘홍보제목’을 선정하여 간결하게 기재하시기 바랍니다.

「뚝섬로 358 주변 사각형거 보수보강공사」

설계변경(정산) 검토 보고

우리구에서 시행중인 『뚝섬로 358 주변 사각형거 보수보강공사』 의 시공 물량 증·감 등에 대하여 아래와 같이 설계변경 시행코자 함.

Ⅰ		사업현황

○ 사 업 명: 뚝섬로 358 주변 사각형거 보수보강공사

○ 사업기간: 2019. 5. 17. ~ 2019. 11. 12.

○ 공사개요: 사각형거 단면보수 889.9㎡

○ 도 급 자: 비엔에스이건설(주) (대표 장태민)

○ 도 급 비: 168,204,390원(시비)

Ⅱ		설계변경 사유

○ 현장여건에 따른 주요공사물량 증감

- 단면보수 889.9㎡ → 1,211.2㎡

○ 보험료 등 제경비 정산

○ 물량 증․감 내역

공 종		단위	수 량				비고
			당 초	변 경	증 ․ 감
보수공	단면보수(벽체)	㎡	678.80	936.35		257.55
	단면보수(슬래브)	㎡	35.20	35.20		0
	단면보수(바닥)	㎡	176.00	240.00		64
	열화부 단면제거	㎥	27.20	36.70		9.5

Ⅲ		설계변경 내역

○ 공사금액 변경

(단위 : 원)

구 분	당 초	변 경	증 ․ 감
총공사비	343,801,300	422,600,000	증 78,798,700
도 급 비	340,321,300	420,000,000	증 79,678,700
이 전 비	3,480,000	2,600,000	감 880,000

Ⅳ		조치의견

○ 상기 내용과 같이 시공방법 및 물량 증·감 등에 대하여 설계변경 시행하고자 함.

붙  임: 변경설계서 1부.