“기분 좋은 변화, 품격 있는 강남”
		강남구
수신	재무과장
(경유)
제목	세곡동 커뮤니티센터 신축공사 건설사업관리(감리)용역 설계변경 시행

예산과목 : 어르신복지과, 노인 복지 증진, 노인복지관 시설 및 경로당 확충,

강남 어르신행복타운 건립, 시설비및부대비, 감리비 (예산편성부서 : 어르신복지과)

1. 어르신복지과-24533(2019.10.25.)호 및 재무과-27056(2019.11.1.)호와 관련입니다.

2. 세곡동 커뮤니티센터 신축공사 건설사업관리(감리) 용역과 관련하여 아래와 같이  설계변경하고자 합니다.

가. 사 업 명 : 세곡동 커뮤니티센터 신축공사 건설사업관리(감리) 용역

나. 용역기간 : 2018.10.29.~2019.12.31.- 변경후

다. 신축규모 : 지하1층~지상2층(연면적 총3,847.27㎡)

라. 변경금액 : 금770,321,600원(금칠억칠천삼십이만일천육백원)

마. 계약업체 : ㈜포스코 A&C 건축사사무소 대표 김대원

바. 설계변경 내용

구 분	변 경 전	변 경 후	변경(증액)금액
계약금액	************	************	***************
계약기간	‘18.10.29.~’19.11.28.	‘18.10.29.~’19.12.31.	33일 연장

사. 설계변경 사유 : 붙임 참조

아. 예산과목 : 어르신복지과, 노인 복지 증진, 노인복지관 시설 및 경로당 확충,

강남 어르신행복타운 건립, 시설비 및 부대비, 감리비(사고이월)

붙임 : 1. 설계변경 방침

2. 설계변경 검토보고서

3. 설계변경사유서

4. 계약심사결과 및 설계변경 내역서 각1부.

5. 일상감사 결과 통보 및 일상감사 결과 통보서 각1부.  끝

							복지생활국장
주무관							권해주			어르신정책팀장					배근희					어르신복지과장					임동호				복지생활국장						전결 11/06 이광우
협조자				주무관						민지영					계약팀장							이영순					재무과장 직무대리							代박수미
기획재정국장							장원석
시행			어르신복지과-25657									(						)		접수											(						)
우	06090					서울특별시 강남구 학동로 426 (삼성동)															/			www.gangnam.go.kr
전화		02-3423-5905						/전송			02-3423-8838					/	khaeju@gangnam.go.kr												/	부분공개(5)