투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	총무부장
(경유)
제목	소각폐기물 처리용역 설계변경 계약 의뢰(동부 1공구, 1회)

우리 부에서 시행중인 『동부간선도로 확장공사(1공구) 소각폐기물 처리용역에』에 대하여 아래와 같이 설계변경(1회) 계약 의뢰하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 용 역 명 : 동부간선도로 확장공사(1공구) 소각폐기물 처리용역

나. 도 급 비 : 15,539,700원

다. 용역기간 : ‘19.04.10. ∼ ’19.12.31.

라. 도 급 자 : ㈜이알지서비스, 동성산업

마. 예산과목

- 도로계획과, 도로 건설, 간선도로망 확충(도시개발 특별회계), 동부간선도로 확장(월계1교~녹천교), 시설비 및 부대비, 시설비

바. 설계변경(1회)                                                   (단위 : 원)

구 분		당 초	변 경	증. △감
1회	도 급 액	**********	**********	************
	용역기간	*********************	*********************	*

사. 설계변경 사유

- 임시야적장(아레나 사업부지) 사용에 따라 추가 발생한 소각(가연성) 폐기물 처리

- 폐기물 운반 관리시스템(스마스 송장) 반영

붙임  1. 설계변경 방침서 1부.

2. 임시 야적장 사용에 따른 폐기물 처리 계획 1부.

3. 설계변경도서(감리단 검토의견서, 내역서) 1부.  끝.

	토목부장
주무관	권해엽		교량건설과장	장종환		토목부장	11/06 김용제
협조자	주무관	노순재		주무관	황윤기
시행	토목부-20085	(		)	접수		(		)
우	04520	서울시 중구 청계천로 8 프리미엄 플라이스 빌딩 12층	/	http://infra.seoul.go.kr
전화	02-3708-2578	/전송	02-3708-2599	/		/	부분공개(5)