문서번호	기전과-9479
결재일자	2019.11.7.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		기전과장	동부도로사업소장
이지영		정판식	11/07 송만규
협조
	주무관		유영선

『2019년 교통안전표지 유지보수공사(연간단가)』

낙찰차액 사용 및 설계변경(2차) 보고

2019. 11.

동부도로사업소

(기전과)

『2019년 교통안전표지 유지보수공사(연간단가)』

낙찰차액 사용 및 설계변경(2차) 보고

「2019년 교통안전표지 유지보수공사(연간단가)」의 원활한 사업 추진과 예산의 효율적인 사용을 위하여 낙찰차액 사용 및 설계변경에 대하여 검토하고 보고 드림.

1		관련근거

2019년 교통안전표지 유지보수공사(연간단가)

❍ 계약번호[20190217996(2019.02.27.)]

예산재배정 사업 시행계획

❍ 2019년 교통사고 잦은 곳 개선공사 발주계획 [기전과-5429(2019.07.19.)]

❍ 2019년 교통사고 잦은 곳 개선공사 발주계획 [기전과-5858(2019.08.02.)]

❍ 2019년 도로교통 소통개선공사 발주계획     [기전과-6633(2019.08.26.)]

❍ 중앙버스전용차로 흐름개선 단속안내표지판 설치공사 [기전과-8064(2019.10.01.)]

❍ 2019년 도로교통 소통개선공사 발주계획    [기전과-8822(2019.10.21.)]

❍ 2019년 태양광 LED 교통안전표지 설치 계획  [기전과-9206(2019.10.31.)]

2		공사개요

공 사 명 : 2019년 교통안전표지 유지보수공사(연간단가)

공사내용 : 강남구, 송파구, 강동구, 서초구 일부 시도

계약업체 : ㈜동아특수건설 대표 심석래

계약금액 : 금78,116,900원(금칠천팔백일십일만육천구백원정)

계약기간 : ‘19. 3. 5. ~ 12. 27.

3		설계변경 현황

설계변경 사유

❍ 2019년 교통안전표지 유지보수공사(연간단가)

- 작업지시 1~4차 작업완료 및 예정작업(5차) 물량증가에 따른 낙찰차액 사용

❍ 예산재배정 사업(2019년 교통사고 잦은 개선공사 외 5건)

- 교통안전표지 유지보수공사(연간단가)에 포함하여 설계변경 후 시행

❍ 사업별 공사개요(2019.11.1.현재)

(단위 : 원)

연번	공사명		공사개요	추진현황	소요예산	비고
1	2019년 교통안전표지 유지보수공사(연간단가)		교통안전표지 신설 및 철거,교체 (송파,강동,강남,서초일부)	- 1~4차 작업완료 물량 신설 : 302매 철거 : 117매 교체 : 48매 - 5차 작업예정 물량 신설,철거,교체: 80매	92,800,000
2	예산재배정 사업		교통안전표지판 신설 등		27,091,960
	사업명	2019년 교통사고 잦은 곳 개선공사 (역삼역교차로 외 10개소)	- 교통안전표지 신설47매, 철거8매, 이설 5매 등 - 교통안전표지(LED) 신설 1EA	연간단가 포함 5차 작업지시 예정	15,697,000
		2019년 교통사고 잦은 곳 개선공사 (송파경찰서 외 1개소)	- 교통안전표지 신설21매, 철거10매 등		5,770,500
		2019년 도로교통 소통 개선공사 (기자촌아파트 교차로)	- 중형철주 신설 1SET, 철거 1SET 등		350,000
		중앙버스전용차로 흐름개선 단속안내표지판 설치공사(잠실역)	- 진행방향표지판 문구 수정 3개소 - 버스전용 단속표지판 신설 2개소 등		2,496,460
		2019년 도로교통 소통 개선공사 (가락시장교차로)	- 교통안전표지 신설2매, 철거8매 등		785,000
		2019년 태양광 LED 교통안전표지 설치계획	교통안전표지(LED) 신설 14EA		1,993,000

예산집행 현황

(단위 : 천원)

연번	공사명	소요예산	발주금액	계약금액	예산집행 현황			비고
					계	낙찰차액	집행잔액
1	2019년 교통안전표지 유지보수공사(연간단가)	92,800	90,000	78,116	14,683	11,883	2,800
2	소액 예산재배정 사업	27,091	-	-	27,091	-	27,091
	합 계	119,891	90,000	78,116	41,774	11,883	29,891

예산사용 계획

(단위 : 원)

연번	공사명	낙찰차액 및 집행잔액			비고
		계	낙찰차액	집행잔액
1	2019년 교통안전표지 유지보수공사(연간단가)	14,683,000	11,883,100	2,800,000	유지보수공사 설계변경에 반영하여 공사시행
2	소액 예산재배정 사업	27,091,960	-	27,091,960
	합 계	41,774,960	11,883,000	29,891,960

설계변경 금액

(단위 : 원)

구 분		변경전 금액	변경후 금액	증・감	비고
총공사비		78,116,900	119,891,960	증 41,775,060
도급비	공급가액	71,015,364	108,992,691	증 37,977,327
	부가가치세	7,101,536	10,899,269	증 3,797,733
	소 계	78,116,900	119,891,960	증 41,775,060

4		보고자 의견

상기와 같이 예산사용 계획에 따라 2019년 교통안전표지  유지보수공사(연간단가)의 설계변경을 시행하여 공사 추진에 만전을 기하고자 합니다

붙 임 : 1. 설계변경 내역서 1부.

2. 소액 예산재배정사업 시행 계획 각 6부.  끝.