문서번호	운영과-7709
결재일자	2019.11.7.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

					시 민
★주무관	운영과장	중랑물재생센터소장
도형철	최영효	11/07 이성재
협 조	주무관			이창하
	주무관			신정현

「시민의 건강 및 작업자 근무환경 개선」을 위한

작업공간 등 근무 환경개선 공사 및 발주계획

2019. 11.

중랑물재생센터

(운영과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	□	■
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사 등	■	□
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 분석 등	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등 - (온실가스 감축) 건물 및 수송 분야 에너지사용 절감방법, 폐기물 발생 억제 대책 등	■	□
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	□	■
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	□	■
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등	□	■
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	■	□

「시민의 건강 및 작업자 근무환경 개선」을 위한

작업공간 등 근무 환경개선 공사 및 발주계획

시민의 건강 및 작업공간 등 작업자 근무 환경개선 공사를 다음과 같이       시행하고자 보고 드립니다.

Ⅰ		추진경과 및 예산현황

추진경과

○ ‘19. 07. 17. : 센터 운영자대기실 및 작업공간 근무환경개선을 위한 용역시행 통보

- 물재생시설과-954(2019.7.11.), -11405(2019.8.21.)

○ ‘19. 08. 21.: 예산 재배졍 통보(물재생시설과→우리센터)

○ ‘19. 09. 03.: 중랑물재생센터 작업공간 등 근무환경개선 계획보고(계획수립)

○ ‘19. 09. 20.: 기술용역 타당성 심사결과 통보(계약심사과→우리센터)

○ ‘19. 10. 01.: 설계용역 계약체결(용역사: 동일기술공사)

○ ‘19. 11. 07.: 설계용역 검수(운영과→관리과)

예산현황

○ 예   산  액: 1억 (예산 재배정)

○ 배 정 일 자: ‘19. 08. 21. (시 물재생시설과 → 우리센터)

○ 예 산 과 목

- 자본적지출, 유형자산취득, 기계장치, 시설비 및 부대비, 시설비

Ⅱ		발주금액 및 사전절차 검토

○ 발주금액  부족: 예산대비 76,400천원 부족

○ 예산부족 사유: 설계용역사에게 예산범위 내에서 최적의 설계하도록 하였으나                        부득이 예산액이 초과됨

<작업공간 등 근무자 작업환경 개선 총 설계금액>

(단위: 천원)

구 분	예산액	총 설계금액	비 고
(계)	100,000	176,400 (＋76,400)	부족분 (76,400)
설계 용역	100,000	9,267	완료
분뇨장 투입구 고속셔터 개선사업		66,000	금회 발주 (총107,400천원)
(구)건조시설 공장동 급기설비 개선사업		41,400
농축기동 지하공동구 환기설비 개선사업		69,000	예산 부족분 (2020년도 발주)

○ 검토의견: 예산 배정액 대비 실 낙찰액 증감시 따른 절차

- 증(＋): 금회 예산배정액 대비 부족분 발생시 센터 예산 충당

- 감(－): 금회 낙찰차액 활용하여 순차 발주(타 악취 ․ 소음 관련)

○ 예산과목: 중랑물재생센터(우리센터)

- 중랑물재생센터오니처리유지보수,사업비용,영업비용,처리장비,수선유지교체비

(수선유지비).

발주 전 사전절차 검토

○ 분뇨처리동 투입구 악취방지 고속전동셔터 물품․구매설치: 계약심사 대상

- 계 약 심 사: 물품 제조‧구매 추정금액 2천만원 이상이므로 대상

- 용역 ․ 물품: 추정가격 5천만원 초과(대행계약 대상)

※ 서울특별시 재무회계규칙 제3조

○ (구)건조시설 공장동 급기설비 설치: 계약심사 미대상

- 계약심사: 설비공사 3억 원 이상이므로 비대상

Ⅲ		추진계획

추진방향

○ 물품 ․ 구매설치와 공사를 분리 발주하여 배정금액의 효율성

○ 투명성 등 제고를 위한 사전절차(계약심사 및 사전규격공개) 이행

발주방법

○ 분뇨처리장 투입구 악취방지 고속전동셔터: 공개경쟁계약으로 추진

‣ 목적: 인근주민 및 작업자 건강과 악취민원 예방

- 물  품  명: 고속전동셔터(최대: W 8,000 * H4,200) ＊ 5개소

․ 소      음: 15 ~ 20dB, 내풍압 강도: 18 ~ 20m/sec

․ 개폐 속도: 0.5m/sec ~ 1.5m/sec(속도 조절 가능)

○ (구)건조시설 공장동 급기설비: 공개경쟁계약으로 추진

‣ 목적: 인근주민 및 작업자 건강과 악취민원 예방

- 형      식: 시로코팬 * 1대

- 전  동  기: 380V, 3ø, 60㎐, 5.5㎾

○ 총 소요예산액: 107,400천원(전기공사 및 부가세 포함)

- 분뇨처리장 투입구 악취방지 고속전동셔터 / 66,000천원

- (구)건조시설 공장동 급기설비 / 41,400천원

<입찰참가 자격>

‣ 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제13조 및 같은법 시행규칙 제14조의 규정에 의한 자격요건을 갖춘 자로서, 건설산업기본법 제9조에 의한 시설물유지관리업 또는 기계설비공사업 면허를 소지한 업체로 주된 영업소가 서울특별시 및 경기도 소재한 업체이어야 합니다.

○ 추진절차 및 일정

- 계약 심사 의 뢰  ……………………………………………………………‘19.11.12.

‣ 분뇨처리장 투입구 전동셔터 물품․구매․설치: 계약심사 의뢰 (계약심사과)

- 계   약   의 뢰  ……………………………………………………………‘19.11.18.

‣ 분뇨처리장 투입구 전동셔터 물품․구매․설치: 대행계약 대상 (시 재무과)

‣ (구)건조시설 공장동 급기설치 개선: 계약의뢰 (센터)

- 계   약   체 결  ……………………………………………………………‘19.11.29.

- 설   치   완 료  ……………………………………………………………‘19.12.30.

붙임: 1. 분뇨처리장 ‧ 건조시설 개선사업(시방서) 각 1부.

2. 분뇨처리장 ‧ 건조시설 개선사업(설계내역서) 각 1부.

3. 분뇨처리장 ‧ 건조시설 개선사업(견적서) 각각 5부.

4. 분뇨처리장 ‧ 건조시설 개선사업(도  면) 각각 5부.  끝.