문서번호	토목부-20334
결재일자	2019.11.8.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		교량건설과장	토목부장
권해엽		장종환	11/08 김용제
협조
	주무관		황윤기

주차장 부지 산벽옹벽 설치 검토보고

- 천호대로(광나루역) 확장공사 -

2019.11.

도시기반시설본부

(토목부)

주차장 부지 산벽옹벽 설치 검토보고

- 천호대로(광나루역) 확장공사 -

주차장 조성 부지 사면에 식재된 소나무 등이 강우 시 전도될 위험이 있어 안전성 확보가 필요하여 검토 후 보고드림.

※ 관련근거 : 천호수 제2019-183호(2019.10.15.)

Ⅰ		공사개요

○ 공 사 명 : 천호대로(광나루역) 확장공사

○ 위    치 : 광진구 구의동 58-15 ~ 광장동 388-10(아차산역~광나루역)

○ 규    모 : 폭 6차로 → 10차로, 연장 900m(지하차도 580m 포함)

중앙버스전용차로 L=2,600m, 정거장 5개소

상징조형물 설치(높이 23.3m, 승강기 2대)

○ 사업기간 : 2010.10. ~ 2019.11.(7차 2017.07. ~ 2019.11.)

○ 도 급 비 : 59,455백만원(7차 14,775백만원)

Ⅱ		건설사업관리단 보고내용

○ 실정보고 사유

- 체육시설관리사업소의 요청으로 주차장 조성한 부지 사면에 식재된 소나무 등이 강우 시 전도될 위험이 있어 안전조치가 필요한 상황으로 이에 대해 검토 후 보고드림.

○ 추진경위

- 17.06.21. 천호대로 확장공사에 따른 구의야구공원 시설물 관련 협조 요청

· 체육시설관리사업소 운영기획과-8430호

· 주차 시설 부족으로 인해 현장사무실 부지 원상 복구 시 주차장 시설로 복구 요청

- 19.09.26. 주차장 부지 현장 점검 시 체육시설관리사업소 요청사항

· 주차장 부지 내 기존 사면 보강 요청

- 19.10.17. 현장사무실 부지 원상복구(주차장 신설) 관련 추가 협조 요청

· 체육시설관리사업소 운영기획과-13752호

· 급경사면으로 우기철 토사 유실, 붕괴로 인한 측구 배수로 막힘 등이 우려되어 산벽 옹벽 및 자연석 추가 설치 요청

○ 검토 내용

- 옹벽 추가 설치 구간 현황

구 분	검 토 내 용		비 고
위치도
현장 사진
설치 수량 검토	○ 설치 연장 23.00m ○ 설치 면적 77.48㎡ ○ Soil nail 28공

- 시공 공법 비교

구분	RC옹벽	산벽옹벽(구조형 조경석 옹벽)	가공 조경석 쌓기
시공사진
장 점	• 자재 수급 용이 • 가장 일반화된 시공법	• 자연석 쉘구조로 인터록킹 가능 • 앵커 일체화 T형 con'c 구조물 사용 • 마찰 및 저항력 극대화, 균일화 • 수평연결로 층다짐이 우수 • 격자형으로 연결되어 일체화된 거동	• 자연석 쉘구조로 인터록킹 가능
단 점	• 양생기간에 따른 공기 과다 소요 • 변위에 취약	• 숙련된 기능공 필요	• 숙련된 기능공 필요 • 외부변동에 쉽게 변형(하자발생) • 적용가능 조건이 까다로움 • 넓은 시공폭 요구
선 정		◎
검토내용	•강성구조로 안전성 우수, 미관 불량	•원가 및 공기절감 가능, 미관 우수	•변형우려 및 안전성 불량. 미관 양호

- 시공구간 횡단면도 검토

Sta. 0+050	Sta. 0+060	Sta. 0+069

○ 수량 증·감 검토

공 종	규 격	단위	당 초	변 경	증·△감	비고
토공
터파기		**	*	*****	*****
터파기		**	*	*****	*****
되메우기 및 다짐		**	*	*****	*****
산벽옹벽공
옹벽기초		*	*	*****	*****
산벽옹벽(Soilnail연결형)		**	*	*****	*****
사면보강공
SOIL NAIL		*	*	*****	*****

○ 공사비 증감 내용                                  (단위 : 천원)

구 분	당 초	변 경	증·△감	비 고
주차장부지 산벽옹벽 설치공사	*	******	******
직접공사비	*	******	******
간접공사비	*	******	******
도 급 액	*	******	******
총공사비	*	******	******	*

○ 감리단 종합검토의견

- 체육시설관리사업소 요청사항인 주차장 부지 조성 중 합동 현장 점검 실시 결과 주차장 이용 시민의 안전을 위하여 기존 사면 보강 조치(옹벽 설치)가 필요한 것으로 판단되며

- 옹벽 형식은 옥내변전실 상부 및 측면에 설치된 산벽 옹벽을 연장하여 설치하는 것이 타당할 것으로 사료됨.

Ⅳ		조치계획

○ 강우로 인하여 소나무 등이 전도될 위험이 있으므로 옹벽을 설치하여 시민의 안전 보호가 필요하다는 감리단의 검토의견이 타당하여 승인 조치하고 추후 설계변경 시 반영하고자 함.

붙임  건설사업관리단 검토 의견서 1부.  끝.