문서번호	시설과-8153
결재일자	2019.11.8.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관	주무관	시설과장	관리부장
김학석	조대복	양희상	11/08 심상원
협 조
	전략기획실장		代임문자
	총무과장		유연호
	조경과장		김강환
	주무관		김효준

재배온실 도시가스 공급관 설치 계획

2019.11.

서울대공원

(시설과)

재배온실 도시가스 공급관 설치 계획

식물원 전시온실의 전시식물 재배를 위한 온실 난방설비에 연료인 가스 공급시설이 없어 신규 도시가스 공급라인을 설치하고자 함

□ 사업개요

○ 사 업 명 : 서울대공원 식물원 재배온실 설치공사(기계설비)

○ 소요예산 : 100,392천원

○ 사업추진근거 : 서울대공원 시설과 – 6117호(2019.08.26.)

○ 공사내용

- 재배온실 3,4동 난방 및 급수시설 설치

- 온실차폐막 개폐장치 및 제어공사 등

□ 시설현황 : 유리온실 가스공급 라인만 설치되어 있음

○ 재배온실 쪽 도시가스 공급라인이 없음

- 2016년 4월 주보일러실 상부 토사제거시 기존라인 철거조치후 유리온실 가스공급관만 설치됨

○ 시설 현황도

가스공급관 현황도

□ 개선방향

○ 도시가스 매립배관 신설

- 향후 설치될 임시온실 1,2동을 위해 PE110mm로 신설

- 배관 설치시 주보일러실 상부(옥상)을 인접지역으로 설치

○ 설치 계획도

가스공급관 설치 계획도

□ 시행방법 및 소요예산

○ 시행방법

- 재배온실 설치공사와 별도공사로 추진

▶ 터파기 공정이 추가되는 가스시설설치로 전문공사업 면허중  가스시공시설업 1종 면허 소지자만 설치 가능함

- 동절기 도래전 재배온실 설치 완료를 위해 동일 기간에 가스시공시설업 1종 전문업체와 수의계약으로 추진

○ 소요예산 : 25,000천원

- 예산과목 : 공원이용시민 만족도 향상, 산림내 이용시설 및 조경관리강화, 공원시설물 유지보수 및 정비, 시설비 및 부대비, 시설비(기계설비 정비비)

Ⅲ		추진일정

□ 조속한 시행 조치

○ 자체설계를 통한 조속한 공사발주 시행

- 가스시공업 1종 면허의 전문업체와 수의계약 추진(11월중)

○ 가능한 동절기 도래전 완료 조치(12월15일 전 준공)

□ 세부 추진일정

○ 공사발주  ------ ----- ----- ----- ----------------- ‘19. 11월.

○ 공사착공 ----------------------------------------- ‘19. 11월.

○ 공사준공  ---------------------------------------- ‘19. 12월 중.  끝.