문서번호	설비부-17503
결재일자	2019.11.8.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관	시책사업과장	설비부장
김수진	이종근	11/08 임정규

『동부간선도로 확장(1-2공구) 통신공사』

관급자재 구매계획 검토보고

2019. 11.

도시기반시설본부

(설 비 부)

『동부간선도로 확장(1-2공구) 통신공사』

관급자재 구매계획 검토보고

『동부간선도로 확장(1-2공구) 통신공사』에 소요되는 관급자재 구매계획에 대하여 검토하고 보고 드림

1		공사현황

공사개요

❍ 사 업 명 : 동부간선도로 확장(1-2공구) 통신공사

❍ 공사위치 : 노원구 월계1교 ~ 창동교

❍ 공사규모 : (1공구) 도로확장 4→6차로, L=1,4km(지하차도 402m 포함)

(2공구) 도로확장 4→6차로, L=3.2km(지하차도 2.9km 포함)

❍ 주요설비 : 비상전화, CCTV, 도로전광표지판, 영상검지기, 라디오재방송

❍ 공사기간 : 2008.12.29 ~ 2019.12.31.

❍ 도 급 비 : 1,347백만원

❍ 감 리 단 : (1공구)㈜도화엔지니어링, (2공구)㈜이산

❍ 시 공 사 : ㈜퓨젼아이앤씨

2		추진경과

❍ '07. 08. : 기본 및 실시설계(도로계획과)

❍ '09. 01. : 공사 착공

❍ '15. 09. : 지하차도 연장에 따른 사업계획 변경(도로계획과)

❍ '16. 01. : 지하차도 연장에 따른 설계용역 계약 및 착수

❍ '17. 12. : 지하차도 연장(2,380m → 2,980m)에 따른 설계변경

․전기(도급비) :  5,474백만원 → 10,788백만원

․통신(도급비) :    708백만원 →  1,347백만원

❍ '19. 03. : 통신공사 5차 착공(계약금액 420백만원)

3		관급자재 구매 계획

❍ 관련문서 : 관급자재 발주 요청(동부2감-19-440호)

❍ 구매방법 : 조달청 구매 의뢰

❍ 관련규정

- 『조달사업에 관한 법률』제5조의2 및 같은법 시행령 제9조의3 제1항

- 『중소기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 법률』제7조 및 제12조

❍ 소요예산 : 1,306,242천원

❍ 품목별 구매방법

품 명	규 격	수 량	소요예산	계약방법	납품시기
도로전광표지판	VMS, LCS	7개소	553,910천원	총액계약 (조달우수)	'20.12.설치
라디오재방송	DMB, FM	1식	442,827천원	일반입찰	'20.12.설치
영상감시장치	고정형, 회전형	21개소	309,505천원	총액계약 (조달우수)	'20.12.설치

4		검토의견

❍ 책임건설사업관리기술자 검토의견

- 영상감시장치, 도로전광판, 라디오재방송의 설계도서를 법령 근거에 따라 검토한 결과 각 시스템의 기능이 적절하게 수행 가능하고 시스템의 호환성 및 경제성에 적합하도록 설계되어있어 설계도서대로 관급자재 발주하는 것이 적정함.

❍ 검토결과 조치의견

- 건설사업관리기술자가 제출한 동부간선도로 확장 통신공사의 관급자재 발주요청에 대해 검토한 결과 적정한 것으로 판단되어 관급자재 계약의뢰하고자 함.

붙 임 : 건설사업관리기술단 공문 1부.  끝.