문서번호	행정지원과-24208
결재일자	2019.11.8.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
★주무관		행정지원과장	서부수도사업소장
방만천		한병주	11/08 박영헌
협 조
	행정관리팀장			엄태현

‘상수도사업본부 발족 30년!, 수돗물 통수 111년!, 믿음직한 아리수’

「비탈면(팔각정 하부) 보수보강공사」

실정보고서 검토보고

2019. 11. 8.

서부수도사업소

【행정지원과】

「비탈면(팔각정 하부) 보수보강공사」

실정보고서 검토보고

「비탈면(팔각정 하부) 보수보강공사」와 관련하여 시공사((주)수인엔지니어링)로 부터 실정보고서가 접수되어 검토결과를 보고 드림.

□ 공사현황

○ 공 사 명:「서부수도사업소 비탈면(팔각정 하부) 보수보강공사」

○ 공사기간: 2019. 10.14. ~ 12.2.

○ 공사내용

- 1구간(8m:기대기식옹벽+락볼트), 2구간(14m:낙석방지망+락볼트

○ 시공업체: ㈜수인엔지니어링

□ 실정보고 현황

○ 보고내용

- 작업구간의 암층이 크랙이 가 있으며 상당히 불안정한 형태를 이루고 있어 작업자들의 안전과 작업공간의 안전을 위해 보강 작업 필요

- 공사 작업이 암반천공이라는 특이점을 감안하여 불안정한 암반에 진동 등의 외력이 발생할 경우 암반의 붕괴 등 상당한 위험성이 예측되어 기 설계된 공사 방법 외 추가적인 안정성 보장을 위한 숏콘크리트 작업제안

○ 추가공정 현황

구분	당초	변경 (물량)	개략공사비(원)	비고
면정리 및 토사쌓기	-	****	*********	낙석 및 나무뿌리 제거
숏콘크리트	-	****	**********	상부, 전면, 측면
장비비	-		*********	장비운반, 인양 및 인하 작업비 포함
계			**********

※ 상세내역은 추후 별도 보고예정

□ 검토결과 및 조치계획

○ 검토결과

- 공사현장의 장비사용 여유공간이 협소하고, 비탈면의 경사도가 90도 정도로 공사의 어려움이 있는 상태이고,

- 암반 천공시 외력에 의한 암반의 추가 붕괴 위험성이 존재하므로, 안전시공을 위해 시공사에서 제안한 숏콘크리트 작업 반영이 필요하다고 판단됨.

○ 조치계획

- 시공사에서 실정보고 제출된 추가공정 현황에 대한 공사비용은 상세내역을 제출받아, 추후 실적공사비로 설계변경시 반영

붙임  실정보고서(공문, 요약문, 도면) 1부.