문서번호	급수운영과-27103
결재일자	2019.11.8.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		급수운영팀장	급수운영과장
황규성		이상환	11/08 代이상환
협조

협의단가 요청에 대한 적용요율 검토보고

『중곡동 104-5~구의동 556-6 외 9개소 배급수관 정비공사』

2019. 11.

동부수도사업소

(급수운영과)

협의단가 요청에 대한 적용요율 검토보고

『중곡동 104-5~구의동 556-6 외 9개소 배급수관 정비공사』

‘중곡동 104-5~구의동 556-6번지 외 9개소 배급수관 정비공사’ 중 추가 작업지시로 인한 증가된 물량의 적용요율 검토요청에 대해 아래와 같이 보고드림.

□ 공사현황

○ 공 사 명: 중곡동 104-5~구의동 556-6번지 외 9개소 배급수관 정비공사

○ 계 약 자: **************

○ 계약금액: *************

○ 계약기간: 2019. 4. 2. ~ 2019. 11. 21.

□ 보고내용

○ **************으로부터 추가 작업지시 구간에 대한 적용요율 결정 요청

- 대상공종: 추가 구간 작업지시에 따른 발생 공종

· 능동 25번지 서울어린이대공원 후문(D=150mm, L=165m)

· 능동 223-9~223-41번지(D=150mm, L=150m)

※ 관련대호: 급수운영과-18698(2019.8.2.)

○ *******************************************

- *************************

- ****************

【 관련근거】

○ 협의가 이루어지지 않을 경우

설계변경 당시를 기준으로 하여 산정한 단가와 그 단가에 낙찰률을 곱한 금액의 범위 안에서 발주기관과 계약상대자가 서로 주장하는 각각의 단가기준으로 협의하여 결정하여야 하지만 서로 협의가 이루어지지 않을 경우 (산정한 단가+단가에 낙찰률을 곱한 금액)의 50/100 적용

○ 관련규정

· 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제65조 제3항의3

· 공사계약 일반조건 제19조 제2항

· 지방자치단체 입찰 및 계약집행기준 제13장 제7절1-나항

□ 조치의견

신규발생 공종에 대한 단가산출 시 조정된 요율*********를 적용하도록 위탁 감독중인 서울시설공단에 통보하여 설계변경 검토에 만전을 기하고자 함.

붙임  1. 서울시설공단 검토보고서 1부.

2. 협의단가 요청 건(상진토건) 1부.  끝.