문서번호	설비부-17577
결재일자	2019.11.8.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
주무관	열빛총괄과장	설비부장
박경철	여인웅	전결 11/08 임정규
협 조

- 남부도로사업소 청사신축 기계설비공사

관급자재(엘리베이터/송풍기팬) 납품관련 검토 보고

2019. 11.

도시기반시설본부

(설비부)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	□	■
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사 등	□	■
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 분석 등	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등	□	■
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	□	■
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	□	■
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등	□	■
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	□	■

- 남부도로사업소 청사신축 기계설비공사

관급자재(엘리베이터/송풍기팬) 납품관련 검토 보고

『남부도로사업소 청사신축 기계설비공사』관급자재 납품관련 책임건설 사업관리기술단의 검토 보고 내용에 대하여 보고드림

Ⅰ		공 사 개 요

공 사 명 : 남부도로사업소 청사신축 기계설비공사

위    치 : 금천구 시흥대로10길 5 외 8필지

공사기간 : 2017.11.17 ~ 2019.12.31.(총차)

2019.01.09.~ 2019.12.31.(2차)

규    모 : 지하1/지상5층 연면적 5,360㎡(업무시설 및 주민편의시설)

공 사 비 : 1,451,228천원(총차) 1,444,400천원(2차)

시 공 사 : ㈜대윤기술공영/ ㈜일경엔지니어링/ ㈜로터스엔지니어링

감리용역 : 삼우공간건축사사무소/(주)해안건축

Ⅱ		관 련 근 거

관급자재 납품관련 검토보고(삼우 제19-1108-1호, 2019.11.08.)

Ⅲ		검 토 내 용

관급자재 납품연장 불가 품목

건 명	계약금액	납품요구번호	계약업체	납품기한	MAS계약
엘리베이터	***********	************	********	2019/11/12	***********
공기조화기 (송풍용팬)	*********	************	*******	2019/11/12	***********

관급자재 납기연장 불가 사유

○ 관급자재 승강기와 송풍기의 조달청 MAS계약이 종료되어 시스템상       납기연장이 불가함.

관급자재 납품관련 절차(계획)

**********************************

⇩

**************************************

***************************

⇩

*******************************

책임건설사업관리기술자 의견

○ 엘리베이터와 송풍기팬 납품관련 계획을 검토한 결과, 엘리베이터와 송풍기가 현장설치가 완료되었지만 ************************************************************************한 점 등을 고려할 때,

○ 관급자재 업체의 납품계획에 따라 **********************************하여 ************을 하는 것이 원활한 공정관리를 위해 타당하다고 판단됨.

Ⅳ		조 치 계 획

책임건설사업관리기술자 검토의견이 타당하다고 판단되므로 승인하고,    향후 현장 공정, 안전 및 품질관리에 최선을 다하고자 함

붙임 ： 관급자재 납품관련 검토보고 관련 문서 1부.  끝.