문서번호	토목부-20383
결재일자	2019.11.11.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		교량건설과장	토목부장
권해엽		장종환	11/11 김용제
협조
	주무관		황윤기

상부도로 교통안전시설 추가 검토 보고

- 천호대로(광나루역) 확장공사 -

2019.11.

도시기반시설본부

(토목부)

상부도로 교통안전시설 추가 설치 검토 보고

- 천호대로(광나루역) 확장공사 -

상부도로 교통사고 예방을 위해 광진경철서와 합동점검을 실시한 결과 교통안전시설 추가설치가 필요한 것으로 검토되어 보고드림.

※ 관련근거 : 천호수 제2019-205호(2019.11.01.)

Ⅰ		공사개요

○ 공 사 명 : 천호대로(광나루역) 확장공사

○ 위    치 : 광진구 구의동 58-15 ~ 광장동 388-10(아차산역~광나루역)

○ 규    모 : 폭 6차로 → 10차로, 연장 900m(지하차도 580m 포함)

중앙버스전용차로 L=2,600m, 정거장 5개소

상징조형물 설치(높이 23.3m, 승강기 2대)

○ 사업기간 : 2010.10. ~ 2019.11.(7차 2017.07. ~ 2019.11.)

○ 도 급 비 : 59,455백만원(7차 14,775백만원)

Ⅱ		건설사업관리단 보고내용

○ 실정보고 사유

- 아차산지하차도 상부도로 교통사고 예방을 위하여 광진경찰서와 합동점검을 실시한 결과 교통안전시설 추가 설치가 필요한 것으로 검토되어 반영하고자 보고드림.

○ 추진경위

- 18.10.24. 지하차도 상부도로 교통안전시설 현장 점검 실시(교통과-9030호)

· 점검자 : 광진경찰서 교통안전계장 외 2명

· 횡단보도 표지판, 예고 노면 표시 등 교통안전시설 추가 설치 요청

- 19.06.20. 상부도로 안전시설물 추가설치 관련 협의사항 보고(감리단→도기본)

· 광진경찰서 교통과 요청사항 협의 진행 후 결과 보고

○ 검토 내용

- 광진경찰서 요청사항 협의결과

설치장소	요청내용	요청 수량	기설치 수량	추가설치 수량	비고
고원식횡단보도 (4개소)	· 횡단보도 표지판 · 횡단보도 예고 노면표시	8개소 8개소	1개소 -	3개소 4개소
상부도로 시점(양방향), 중간지점	· 속도제한 20km/h 표지판 · 속도제한 20km/h 노면표시 · 주정차금지 표지판	4개소 4개소 4개소	2개소 - -	2개소 4개소 4개소
상부도로 중간지점	· 과속방지턱 · 과속방지턱 표지판	1개소 2개소	- -	없음 없음	설치 불가
회전교차로 진입지점 정지선 전방	· 양보 노면표시 · 회전차량우선 표지판 설치	4개소 4개소	- 5개소	4개소 -
양진초→워커힐호텔 방면 회전교차로 북측 안전지대	· 차량진행방향 도로 선형에 맞도록 안전지대 재구획 검토 필요	1개소	-	1개소	구획 확장

- 교통안전시설물 추가설치 계획도

○ 수량 증·감 검토

공 종	규 격	단위	당 초	변 경	증·△감	비고
교통표지판
규격 삼각변	*******	*	*	**	*
규격 삼각∇	*******	*	**	**	*
규격 원형	********	*	**	**	*
규격 T형부착대	******	***	*	**	*
규격 T형부착대	******	***	**	**	*
규격 철주	******	***	*	*	*
중형 원형	********	*	*	**	*
중형 사각	***********	*	*	*	*
중형 T형부착대	******	***	*	*	*
중형 철주	******	***	*	*	*
노면표시
노면표시(수동식)	*******	**	***	***	**
노면표시(수동식)	*****	**	***	***	**

○ 공사비 증감 내용                                  (단위 : 천원)

구 분	당 초	변 경	증·△감	비 고
교통안전시설공	******	******	*****
교통표지판	******	******	*****
부대공	******	*******	*****
기존도로유지관리	******	*******	*****
직접공사비	*******	*******	*****	*
간접공사비	******	******	*****	*
도 급 액	*******	*******	*****	*
총 공 사 비	*******	*******	*****	*

○ 감리단 종합검토의견

- 광진경찰서(교통과) 합동점검 및 협의결과에 따라 아차산 지하차도 상부도로의 교통사고 예방을 위하여 교통안전시설을 추가로 설치하는 것이 타당한 것으로 사료됨.

Ⅳ		조치계획

○ 감리단의 검토의견이 타당하여 승인 조치하고 추후 설계변경 시 반영하고자 함.

붙임  건설사업관리단 검토 의견서 1부.  끝.