문서번호	토목부-20391
결재일자	2019.11.11.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		교량건설과장	토목부장
권해엽		장종환	11/11 김용제
협조
	주무관		황윤기

상부공원 추가시설물 설치 검토 보고

- 천호대로(광나루역) 확장공사 -

2019.11.

도시기반시설본부

(토목부)

상부공원 추가시설물 설치 검토 보고

- 천호대로(광나루역) 확장공사 -

관련 기관(성동도로사업소, 광진구청, 원설계자) 요청에 의하여 상부공원 추가시설물 설치가 필요하여 검토 후 보고드림.

※ 관련근거 : 천호수 제2019-200호(2019.11.01.)

Ⅰ		공사개요

○ 공 사 명 : 천호대로(광나루역) 확장공사

○ 위    치 : 광진구 구의동 58-15 ~ 광장동 388-10(아차산역~광나루역)

○ 규    모 : 폭 6차로 → 10차로, 연장 900m(지하차도 580m 포함)

중앙버스전용차로 L=2,600m, 정거장 5개소

상징조형물 설치(높이 23.3m, 승강기 2대)

○ 사업기간 : 2010.10. ~ 2019.11.(7차 2017.07. ~ 2019.11.)

○ 도 급 비 : 59,455백만원(7차 14,775백만원)

Ⅱ		건설사업관리단 보고내용

○ 실정보고 사유

- 관련 기관(성동도로사업소, 광진구청, 원설계자)에 요청에 의하여 상부공원 추가시설물 설치가 필요하여 검토 후 보고 드림

○ 추진경위

- 19.03.04. 원설계자(디자인 감리) 요구사항

· 상징조형물 디자인의 완성도를 높이기 위하여 EPS실 점검문과 계량기함 점검구를 일체로 시공할 것

- 19.08.23. 상징조형물 설치구간 유지관리 시설물 설치 요청(광진구청 요청사항)

· 광진구청 도로과-10519호

· 상징조형물 유지관리를 위하여 수도전, 울타리, 관리사무실 설치 요청

- 19.09.20. 추가요청에 대한 원설계자(디자인) 의견(NAMELESS-190902)

· 광진구청 요청사항 일부 수용(수도전, 관리사무실 설치)

· 10월 현장 점검 시 해당 내용 전달 및 관리사무실 형식(스틸컨테이너) 협의 완료

- 19.09.04. 천호대로 확장 전기공사 시설물 인수,인계전 보완 요청

· 성동도로사업소 기전과-4457호

· 옥외 변전실 내부 바닥이 수전반보다 30cm 낮아 전기설비 점검 및 조작 시 안전사고가 우려되어 절연 엑세스플로어 설치 요청

- 19.10.29. 천호대로 확장공사 관련 운영부서 보완요구사항 반영 요청

· 도시기반시설본부 설비부-16801호

· 수배전반 작업 시 안전사고가 우려되므로 엑세소플로어 설치 반영 요청

○ 검토 내용

- 관리사무실 설치 검토(광진구청 요청사항)

관리사무실 선정위치	관리사무실 위치 사진
관리사무실 관급자재 선정 안	관리사무실 사양 검토
	○ 관리사무실 제원 - 규 격 : 스틸컨테이너하우스 (3.0m * 6.0m * 2.5~3.0(H)) - 조달가격 : 9,320,000원 (조달수수료 별도)

- 옥내변전실 내부 바닥 엑세스플로어 설치 검토

액세스플로어 평면도
액세스플로어 단면 1	액세스플로어 단면 2

- 상징조형물 EPS실 점검문과 계량기함 점검구 일체 시공

구분	당초	변경	비고
점검문 평면

- 상징조형물 주변 맨홀 인상

구 분	평 면 도	비고
인상 맨홀 위치
인상 맨홀 수량	▪ 맨홀 인상 : 9개소(각 1.0m 인상) - 제수밸브실 2개소 × 맨홀 2개 = 4 - 퇴수밸브실 2개소 × 맨홀 1개 = 2 - 공기밸브실 3개소 × 맨홀 1개 = 3 ▪ 맨홀 사다리 : 20개(5개소 * 4개)

○ 수량 증·감 검토

공 종	규 격	단위	당 초	변 경	증·△감	비고
공원추가 시설
액세스 플로어	스틸시멘트판넬	M2	-	106	106
냉난방기	6평형	대	-	1	1
콘크리트타설		M3	-	8	8
수목이식	교목 h=1.0~1.2	주	-	1	1
레미콘	무근	M3	-	9	9
점검구 도어	1620*1350	개소	-	1	1
맨홀인상	∅648	개소	-	9	9
맨홀사다리	PE	개	-	20	20
관급자재
관리사무실	스틸하우스, 3m*6m	대	-	1	1
급수대	H=1.2m, 수도꼭지3개	대	-	1	1

○ 공사비 증감 내용                                  (단위 : 천원)

구 분	당 초	변 경	증·△감	비 고
액세스 플로어	-	15,569	15,569
냉난방기	-	2,151	2,151
콘크리트 타설	-	205	205
수목이식(교목)	-	676	676
레미콘(자재)	-	484	484
점검구 도어	-	3,022	3,022
맨홀인상	-	5,606	5,606
맨홀사다리	-	190	190
직접공사비	-	27,903	27,903
간접공사비	-	10,377	10,377
도 급 액	-	38,280	38,280
관급자재비	-	11,271	11,271
총공사비	-	49,551	49,551

○ 감리단 종합검토의견

- 지하차도 상부공원 및 상징조형물 관련 향후 유지관리기관인 광진구청 및 성동도로사업소 요청사항을 반영함이 타당하다고 사료되며,

- 또한, 상징조형물 설치공사와 관련하여 원설계자 의견 및 현장 상황에 맞게 변경하는 것이 타당하다고 사료됨.

Ⅳ		조치계획

○ 감리단의 검토의견이 타당하여 승인조치하고 추후 설계변경 시 반영하고자 함.

붙임  건설사업관리단 검토 의견서 1부.  끝.