설계변경(최종) 심의 의결서

공사명: 청구역~신당역간 송배수관 정비공사

의 뢰 부서명	중부수도사업소 급수운영과
공사 담당	지방시설주사보 안윤자
검토 의뢰일	2019. 11. 7.(목)

검 토 의 견 서

○ 공 사 명: 청구역~신당역간 송배수관 정비공사

○ 검토일시: 2019.11.11.(월) 10:00

○ 심의(검토)내역

- 신규공종 산출 적정성 여부

- 물량 변동의 적정성 여부

- 관련 규정 및 적법성 여부

위   원

직  위

성  명

서  명

의  견

위 원 장

급수운영과장

채재일

11/11

채재일

적정함

위    원

시설운영팀장

이유찬

이유찬

적정함

위    원

시설안전팀장

유세종

유세종

적정함

위    원

급수운영팀장

박장진

박장진

적정함

위    원

급수관리팀장

이훈재

이훈재

적정함

담    당

주무관

안윤자

안윤자

설계변경(최종) 사유서

1. 공사현황

가. 공 사 명: 청구역~신당역간 송배수관 정비공사

나. 공사개요: D = 200 ~ 700mm, L = 712m

다. 공사기간: 2019.04.24. ~ 2019.11.13.

********* ***************

**************************

2. 설계변경 현황

구 분		당 초	변 경	증 · 감
도급비	공급가액	1,218,183,282원	877,130,000원	감) 341,053,282원
	부가세	121,818,328원	87,713,000원	감) 34,105,328원
	계	1,340,001,610원	967,843,000원	감) 375,158,610원
공사 개요	관부설	D=200~600mm, L=712m	D=200~600mm, L=686m	감) L=26m
	변실설치	23개소	25개소	증) 2개소

3. 변경 사유: 도로굴착 불가로 인한 부설연장 감소 등 현장여건 변경에 따른 물량 증·감 및 신규공종 발생

4. 공종별 주요 변경내용

공 종	주 요 내 용	증 · 감	비고
토 공	시공방법 변경으로 인한 토공량 증가 등	증)14,441천원
부 설 공	- 주철직관부설공(600mm) 감소 주철이형관부설공(600mm) 감소 KP이탈방지압륜접합(600mm) 감소 폐관충진 감소 등	감)192,034천원
부 대 공	- 작업일수와 연관된 사용수량 증감 고재처리비 및 부지임대료 정산	감) 25,066천원
제 경 비	4대보험 정산 환경보전비 및 부지임대료 정산	감) 55,306천원

3. 설계변경 사유:

4. 조치계획

상기 공종에 대하여 설계변경 심의위원회 심의결과에 의거 붙임내역과 같이 설계변경을 시행하고자 합니다.

붙 임   설계변경 내역서 1부.

방침서 1부. 끝.