＂상수도사업본부 발족 30년, 수돗물 통수 111년, 믿고 마시는 아리수!＂
	광암아리수정수센터
수신	내부결재
(경유)
제목	준공기한 연기 시행(관내 안전시설 및 정수지 난간 설치공사)

1. 정수시설과-7197(2019.11.12.)호와 관련입니다.

2. 우리 부서에서 시행 중인 ‘관내 안전시설 및 정수지 난간 설치공사’에 대하여 아래와 같이 준공기한을 연기하고자 합니다.

가. 공사개요

1) 공 사 명 : 관내 안전시설 및 정수지 난간 설치공사

2) 계 약 자 : *****************

3) 계약금액 : ****************************

4) 계 약 일 : 2019년 08월 14일

5) 준공기한 : 2019년 11월 17일

나. 준공기한 연기

1) 변경 준공기한 : 2019년 11월 29일

2) 연기사유 귀책소재 : 서울특별시(광암아리수정수센터)

3) 지체상금 부과여부 : 미부과

4) 연기사유 : 공사기간 중 다른 공사들과 작업일정이 겹쳐 공사작업기간을 조율해야 했으며, 관랑실 출입문을 새로 만드는 추가공정이 필요하여 준공기간을 12일 간 연장하고자 함.

붙  임  1. 준공기한 연기 의뢰서 1부.

2. 합의각서 1부.

3. 준공기한 연기 검토보고 1부.  끝.

주무관	김우빈		주무관	박종민		주무관	박은경		정수시설과장	11/12 남효돈
협조자
시행	정수시설과-7242	(		)	접수		(		)
우	12989	경기도 하남시 서하남로 293 광암아리수정수센터 정수시설과	/
전화	02-3146-5383	/전송	02-3146-5309	/		/	부분공개(6)