투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
		서울특별시한강사업본부
수신	총무과장
(경유)
제목	공사 변경계약 의뢰(신마포나들목 신설공사(장기계속))

우리 본부에서 추진중인 『신마포나들목 신설공사(장기계속)』에 대하여 아래와 같이 변경계약 의뢰(기간 변경) 합니다.

가. 계약현황

- 공 사 명 : 신마포나들목 신설공사(장기계속)

- 공사기간 : (총차) ‘17.08.30. ~ ’19.11.17.

(3차)  ‘19.04.01. ~ ’19.11.17.

- 공 사 비 : (총차) 4,728,434,000원

(3차)  1,260,134,000원

- 시 공 사 : 우탑건설주식회사 대표자 김성현

나. 변경내역(계약기간)

(단위:원)

구 분		당초계약기간	변경계약기간	비 고
계약금액	총 차	‘17.08.30.~’19.11.17.	‘17.08.30.~’19.12.23.	기간변경
	3 차	‘19.04.01.~’19.11.17.	‘19.04.01.~’19.12.23.

- 계약기간 변경사유 : 발주처 지시 추가공사(전망데크 및 한강변 난간 설치)

다. 예산과목

- 한강공원 관리 및 운영, 한강 접근체계 개선, 한강공원 나들목 증설 및 개선, 시설비 및 부대비, 시설비

붙  임 : 1) 공사기간 연장사유서 1부.

2) 공사기간 연기합의서 1부. 끝.

							시설부장
주무관							정창수			기반시설과장					라철흠					시설부장					11/12 전영주
협조자
시행			기반시설과-3747									(						)		접수											(						)
우	04770					서울특별시 성동구 강변북로 257 (성수동1가 642-25)															/
전화								/전송			02-3780-0744					/													/	대시민공개