문서번호	하천관리과-16583
결재일자	2019.11.13.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
주무관	치수설비팀장	하천관리과장		물순환안전국장
최병희	이문주	한유석		11/13 이정화
협 조
	방재시설부장		이임섭

사천(망원)빗물펌프장 “유입관로공사”시행계획 보고

2019. 11.

물순환안전국

(하천관리과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	■	□
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

사천(망원)펌프장 유입관로공사 시행계획보고

마포구 망원배수구역 배수개선 대책으로 유역분리를 통한 하류 간선관로 부하저감을 위하여 설치하는 사천(망원)빗물펌프장 유입관로공사 시행계획에 대한 보고임

Ⅰ		추진배경

○ 2010년(488세대), 2011년(231세대) 침수피해 발생

○ 연남동 일대 침수방지 대책마련 시장님 지시(‘13.8.2)

○ 2019년 시장님 신년 업무보고(침수취약지역 7개소 ’21년 완료)

Ⅱ		추진경위

○ 2014. 7. : 동교배수분구 하수관거 종합공사 실시설계용역 착수

(망원배수구역 배수개선방안 기본계획 포함)

○ 2016. 6. : 망원배수구역 침수해소사업 추진계획 방침

○ 2016.12. : 망원배수구역 배수개선대책 기본 및 실시설계 용역 착수

○ 2019. 1. : 추가 8만호 공급관련 사업부지 공공주택지구로 지정

○ 2019. 2. : 망원배수구역 배수개선대책 기본 및 실시설계 용역 준공

○ 2019. 3. : 사천빗물펌프장 추진관련 현안보고(부시장님 보고)

○ 2019. 4. : 연희 공공주택지구 사업추진 관련 업무협조 요청(공공주택과)

(펌프장 ‘19. 9월 착공, SH공사 공공주택+펌프장 통합발주)

○ 2019. 5. : 사천빗물펌프장 추진계획 보고(유입관로공사 물순환안전국 시행)

○ 2019. 7. : 사천빗물펌프장 발주의뢰(sh공사)

Ⅲ		사업개요

□ 사천(망원)빗물펌프장 유입관로 설치

○ 기    능 : 기본 하수암거에서 분기되어 상류부 수위 상승시 분기맨홀(가동보)를 통해 중간빗물펌프장으로 빗물을 유입하는 관로

○ 위    치 : 연희교차로(연희 임광아파트) ~ 사천교 인근 사천펌프장

○ 규    모 :  D=3,000mm, L=965m

분기맨홀(B=8.0×W4.8×H4.6m) 1개소

○ 사업기간 : ’20. 1.~’22. 06.

○ 사 업 비 : *************************

*******************************

Ⅳ		추진방향

□ 유입관로내 부유물질의 퇴적물은 강우시 일정유량이 유입되면 유속에 의해 세정하는 방식으로 계획

○ 소류력 검토결과 소류속도(2.24m/s)를 상회하는 3.97m/s 유지

□ 공동주택과 복합개발하는 펌프장 공정에 맞게 유입관로 공사 별도시행

Ⅴ		추진계획

□ 유입관로 통수능 검토결과

유량	규격	연장	조도계수	경사	수심비
25.0㎥/s	D=3,000m	965.3m	0.013	3.101%	0.82

□ 유입관로는 관로의 규격과 매설조건, 교통량 등을 고려하여 Semi-shield추진공법으로 계획(설계)

□ 유입관로 계획 평면도

□ 연차별 사업비 투입 계획

구분	합계	연차별 사업비			비고
		‘20년	‘21년	‘22년
*** *****	******	******	******	*****	*******

□ 효율적인 사업추진을 위한 업무협업

○ 유입관로 설계용역 : 물순환안전국(물재생계획과)

○ 유입관로공사 사업비 확보 및 공정관리 : 물순환안전국(하천관리과)

○ 유입관로공사 발주 및 시행 : 도시기반시설본부 방재시설부

Ⅵ		향후 추진일정

□ ‘19. 11. : 공사 발주 의뢰(하천관리과→도시기반시설본부)

○ 계약심사 등 사전절차 이행을 위한 사전 조치

□ ‘19. 12. :  ‘20년 사업비(100억원) 확보(하천관리과)

□ ‘20. 03. : 유입관로 공사 및 감리용역 발주

첨부 : 소요사업 및 예정공정표 1부.  끝.