문서번호	도로계획과-15549
결재일자	2019.11.13.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
주무관	간선도로계획팀장	도로계획과장		안전총괄관
강전남	김경호	안대희		11/13 김홍길
협 조
	예산4팀장		김유진

「디지털3단지~두산길간 지하차도 공사」

예산변경(통계목) 및 집행계획

2019.  11.

안전총괄실

(도로계획과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	□	■
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사 등	□	■
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 분석 등	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등 - (온실가스 감축) 건물 및 수송 분야 에너지사용 절감방법, 폐기물 발생 억제 대책 등	□	■
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	□	■
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	□	■
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등	□	■
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	■	□

「디지털3단지 ~ 두산길간 지하차도 공사」

예산변경(통계목) 및 집행계획

‘디지털3단지~두산길간 지하차도 공사’ 현안사항 발생(감리투입계획 변경)에 따라 감리비********* 부족분 확보를 위해 예산변경(시설비→감리비) 코자 함

□ 사업개요

○ 위    치 : 디지털3단지(가산동319-10) ~ 두산길(독산1동 998-10)

○ 규    모 : 폭 4차로(12~26m), 연장 453m(지하차도 폭 2차로, 연장 310m)

○ 사업기간 : 2012. 12 ~ 2022.12

○ 총사업비 : 68,457백만원(구비 200, 시비 68,257)

□ 주요 추진현황

○ '10.03. ~ '10.12.  : 타당성조사 및 기본계획 시행(제일eng)

○ '14.03.06.	: 도시계획시설(도로) 변경결정 및 지형도면 고시

○ '14.06.13.	: 교학사 소 제기(도시계획시설 변경결정 취소)

○ '13.05.24~'14.10.31. : 기본 및 실시설계 준공

○ '15.05.28.	: 투자심사(조건부 가결)

○ '16.09.29.	: 독산동 구간 보상완료(26필지, 2,557㎡)

○ '17.08.25.	: 교학사(가산동 구간) 실시계획인가 집행정지 결정

○ '17.12.26.	: 공사계약 및 착공

○ '18.02.25.	: 교학사(가산동 구간) 실시계획인가 집행정지 만료

○ '19.06.13.	: 중앙토지수용위원회 수용재결 결정(수용일: '19.8.7)

○ '19.08.	: 독산동 구간 도로확장 완료, 교학사 공탁 및 등기이전 완료

○ '19.11현재	: 교학사(가산동 구간) 시설물 이전요청 및 공사중지

**********

*********

*************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************

□ 예산변경 사유

○ 금년 감리비 예산 *********************************** 배정되었으나, 도기본의 감리투입계획 변경에 따라 *******이 증액되어 금년 예산집행 계획 변경이 불가피 함

□ 조치계획

○ 금년 시설비 중 일부 *******을 통계목 조정(시설비→감리비)하여 감리비로 집행토록 예산조정

(단위: 천원)

************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************

붙임: 예산 과목변경 및 재배정요청서(도기본) 1부.