문서번호	설비부-17868
결재일자	2019.11.13.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		열빛총괄과장	설비부장
최대진		여인웅	11/13 임정규
협조

- 탄천물재생센터 3차총인처리시설 기계설비공사 -

관급자재(수문 외 5종) 납품기한 연장 검토 보고

2019. 11.

도시기반기설본부

(설비부)

- 탄천물재생센터 3차총인처리시설 기계설비공사 -

관급자재(수문 외 5종) 납품기한 연장 검토 보고

『탄천물재생센터 3차총인처리시설 기계설비공사』시행중 선행공정인 토목공사 연장에 따른 관급자재 설치시기 미도래로 납품기한 연장요청건에 대해 검토 보고 드림

Ⅰ		공 사 개 요

공 사 명 : 탄천물재생센터 3차총인처리시설 기계설비공사

공사규모 : 총인처리시설 Q=450,000㎥/일

공사기간 : ‘17. 12. 4 ~ ’20. 2. 3.(1차 ‘17.12.4 ~ ’19.12.31)

공 사 비 : 11,715백만원(도급비 1,837, 관급비 9,878)

시 공 사 : ㈜이수에이치앤씨 외 2개사

감 리 사 : ㈜선진엔지니어링 종합건축사사무소 외 3개사

Ⅱ		관 련 근 거

지급자재 납품기한 연장 요청(탄천하감 2019-356호, 2019.11.12.)

Ⅲ		검 토 내 용

관급자재 계약현황

건 명	계약금액	계약번호 (납품요구번호)	계약업체	납품기한	비고
수문	247,715,100	121815144700	㈜신정기공	2019/12/31	조달(2단계)
교반기	490,400,000	12182137500	창신기계제작소	2019/12/31	조달(총액)
혼화조 교반기	152,831,000	201902175A600	㈜우진	2019/12/31	제한(총액)
호이스트	136,156,470	2019040079300	㈜효성감속기	2019/12/31	제한(총액)
PAC저장탱크	138,269,880	20190315CAE00	주원쿨브이㈜	2019/12/31	제한(총액)
폴리머용해장치	82,171,890	2019040A26400	에이치피아이	2019/12/31	제한(총액)

납품 및 용역기한 연장사유

○ 선행 공정인 토목공사 지연으로 후속공정인 기계설비공사 작업시기가 미도래하여 관급자재에 대한 납품기한 연장

귀책소재 : 도시기반시설본부

지체상금 부과여부 : 미부과

납품기한 변경(수량 및 금액 변동없음)

계약명	계약번호 (납품요구번호)	계약업체	납품기한		비고
			당 초	변 경
수문	121815144700	㈜신정기공	2019/12/31	2020/12/31	조달
교반기	12182137500	창신기계제작소	2019/12/31	2020/12/31	조달
혼화조 교반기	201902175A600	㈜우진	2019/12/31	2020/12/31	자체
호이스트	2019040079300	㈜효성감속기	2019/12/31	2020/12/31	자체
PAC저장탱크	20190315CAE00	주원쿨브이㈜	2019/12/31	2020/12/31	자체
폴리머용해장치	2019040A26400	에이치피아이	2019/12/31	2020/12/31	자체

건설사업관리기술자 의견

○ 탄천물재생센터 3차(총인)처리시설 기계설비공사 건설사업관리 업무 수행중 토목, 건축공사의 지연으로 지급자재 설치는 구조물 완료후 1~2개월이 소요됨으로 납품기한 연기는 적정한 것으로 판단됨

Ⅳ		조 치 계 획

건설사업관리기술자 검토의견과 같이 원활한 사업추진을 위해 선행공정에 맞춰 당초 조달구매 요청한 관급자재 납풉기한을 총무부에 연기요청 의뢰하고자 함

붙임 ： 관급자재 납품기한 연장 관련 건설사업관리단 검토의견서 및 문서 1부.  끝.