문서번호	설비부-17873
결재일자	2019.11.13.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		녹색성장과장	설비부장
마동훈		오삼록	11/13 임정규
협 조

『창덕궁앞 도성한복판 주요가로 전기공사』

관급자재 구매취소 및 변경 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2019.11.

도시기반시설본부

(설비부)

『창덕궁앞 도성한복판 주요가로 전기공사』

관급자재 구매취소 및 변경 보고

『창덕궁앞 도성한복판 주요가로 전기공사』에 따른  관급자재(분전반)에

대하여 관할구청 요구로 인한 변경에 대하여 보고 드림.

Ⅰ		관련근거

□ 종로구청 도로과-14322(2019.9.06.)

-  창덕궁앞 도성한복판 가로등 교체공사 관련 의견송부

Ⅱ		사업개요

□ 공사명  : 창덕궁앞 도성한복판 주요가로 전기공사

□ 공사기간 : ‘19.01.11.~’20.01.10.(1차 : ‘19.01.11.~’19.09.30.)

□ 공사비 : 도급액 금1,069,240747원(1차 : 금532,000,000원)

□ 감리사 : ㈜경동엔지니어링, ㈜대한콘설탄트

□ 시공사 : ㈜유니시스엔지니어링

□ 공정율 : 15 %

Ⅲ		계약최소 및 변경내용

□ 대상 관급자재

구분	계약번호 (납품요구번호)	계약자	품 명	금액(원)	납품기한
					당초	변경
**	*********** **************	** ******	****** *************	**********	***********	****
**	*	** ******	******** *************	**********	*	**** *************

□ 사  유 : 관할구청인 종로구청 요구사항 반영으로 변경

○ 종로구청 의견 : 보행공간을 확보하고 향후 유지관리가 용이하도록

통합형 분전반 설치요망

□ 귀책소재 : 서울특별시 도시기반시설본부

□ 지체상금부과여부 : 미부과

Ⅳ		보고자 의견

□ 종로구청 요구사항에 대하여 도심지 좁은 보도의 보행공간을 확보하고

유지관리의 편의를 도모하고자 기존 분전반을 계약취소하고 지주통합형

분전반으로 변경 구매하고자 함.

첨부   : 종로구청 요청 공문 1부. 끝.