문서번호	조경과-16333
결재일자	2019.11.13.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	조경관리팀장	조경과장
이진범	김병완	11/13 문길동

2019년 가로변 녹지량 확충사업(추경)

중랑구 사업대상지 변경 검토 보고

2019. 11.

푸른도시국

조  경  과

2019년 가로변 녹지량 확충사업(추경)

중랑구 사업대상지 변경 검토 보고

중랑구에서 추진중인 ‘2019년 가로변 녹지량 확충사업(추경)’과 관련하여 사업 대상지 변경 승인 요청이 있어 아래와 같이 검토 보고 드림

[※ 중랑구 공원녹지과-19565호(2019.10.31.)관련]

사업개요

❍ 사 업 명 : 2019년 가로변 녹지량 확충(추경-중랑구)

❍ 위    치 : 중랑구 신내인터체인지(면적 5,000㎡)

❍ 사업기간 : 2019. 07. ~ 12.

❍ 사업금액 : 금350백만원

❍ 사업내용 : 인터체인지내 수목식재 등 녹지확충, 관수시설 설치 등

대상지 변경내용

❍ 변경내역

구 분	대상지	면적(㎡)	사업내용	소요예산
당 초	신내IC(신내동 278-49)	5,000	수목식재, 조형물 설치	350백만원
변 경	망우역 교통섬(상봉동 160-2)	700	수목식재, 조형물 설치	350백만원

❍ 변경사유

- 신내IC가 향후 도로확장사업(태릉~구리IC) 부지에 포함되어 직결램프 신설 등 도로공사가 계획되어 있어, 대부분이 점용구간에 포함됨

※ 붙임 서울시 도로계획과-14661호(2019.10.25.) 참조

- 변경하고자 하는 망우역 일대는 KTX, 경춘선, 공항버스 등 교통 이용객이 많으며, 대형 마트 등이 밀집하여 유동인구가 많은 지역으로 사업 효과가 클 것으로 판단됨

❍ 변경 대상지 위치도 및 현황사진

위치도	현황사진

보고자 의견

❍ 당초 사업대상지가 도로사업에 포함되어 대상지 변경이 불가피하며, 변경 대상지의 지리적인 위치 등을 고려할 때 사업대상지로 적정함

❍ 단, 사업대상지 변경으로 규모가 축소됨에 따라 과도한 설계가 되지 않도록 설계심의 등 향후 사업추진에 만전을 기하고자 함

붙임문서 1. 도로계획과 공문 1부

2. 설계심의 결과서 1부.  끝.