문서번호	정수과-12543
결재일자	2019.11.14.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		정수과장	영등포아리수정수센터소장
유민석		정종기	11/14 가길현
협조

상수도사업본부 발족 30년, 수돗물 통수 111년, 믿고 마시는 아리수!

막여과시설 내 유해화학물질 처리 검토보고

2019. 11.

영등포아리수정수센터

【 정수과 】

막여과시설 내 유해화학물질 처리 검토보고

막여과시설 운영 휴지에 따라 미사용 장기보관으로 안전성 우려가 있는 유해화학물질(황산,수산화나트륨)을 적정 처리하여 화학사고 발생을 예방하고자 함

□ 관련근거

○ 영등포아리수정수센터 막여과시설 운영방안(본부장 방침, 정수과-9029(‘19.8.20.))

○「화학물질관리법」제31조(유해화학물질 취급의 도급신고 등)

○ 국민신문고 민원질의(민원 1AA-1908-232057)

- 황산 구매시 과량구매하여 불필요한 양을 판매업체로 다시 반출하는 경우 폐기물관리법에 저촉되는지?

▸ 별도의 수리·수선이나 세척을 하지 않고, 성상 및 형태의 변화없이 원형 그대로 동일용도로 재사용하는 경우 폐기물에 해당하지 않음

- 사업장 내 황산을 다른 저장탱크로 옮겨서 사용하는 경우 화학물질관리법에 따른 필요절차가 있는지?

▸ 유해화학물질을 취급하는 사용시설 설비의 청소,검사,설비수리,교체 등은 취급시설의 유지관리로 볼 수 있어 도급하는 경우 도급신고 대상임

□ 막여과시설 유해화학물질 취급현황

취급시설 및 취급물질

시설용량

보유량

유해화학물질 구분기준

취급 물질	유해화학물질
	유독물질	사고대비물질
황산	10%이상	10%이상
수산화나트륨	5%이상	-
○ 우리 센터의 경우 기준농도 이상 취급하므로 유해화학물질에 해당

막여과

시설

총계

7기

12,053 kg

소계

5기

9,557 kg

황산

(75%)

침지식

3㎥×1

1,396 kg

3㎥×1

3,302 kg

4㎥×1

3,791 kg

가압식

1㎥×1

534 kg

1㎥×1

534 kg

소계

2기

2,496 kg

수산화
나트륨

(30%)

침지식

4㎥×1

491 kg

가압식

4㎥×1

2,005 kg

□ 용역 과업내용 및 절차(안)

연번

처 리 업 무

세 부 내 용

1

용역계약 체결

유해화학물질 영업허가업체 중 선정

2

유해화학물질 취급 도급신고서 제출

도급신고서 제출시 첨부서류
1	도급인·수급인 주요생산품,매출액
2	도급계획서
3	화학사고 안전관리계획서

수급인이 실제업무를 수행하기 전까지
유해화학물질 취급 도급신고서 제출
(→한강유역환경청)

3-1

수산화나트륨 이송

우리 센터 수산화나트륨 주탱크로 이송

3-2

황산 반출

황산 취급업체로 반출

(성상,형태변화 없이 원형 그대로 반출)

3-3

황산 인수인계서(또는 확인서) 수령

유해화학물질 영업허가업체에
황산 원형 그대로 반출하였음을 증빙

4-1

빈 탱크 물청소

이송·반출 작업후 빈 탱크 내부(총 7기) 남은잔량은 중화처리 한 후 물청소

4-2

물청소 발생폐수 처리

우리 센터 배출수처리장에 배출

(폐수배출시설설치 허가 보유)

5

용역 종료

용역 준공처리 후 대가지급

□ 용역 개요

○ 용 역 명 : 막여과시설 내 유해화학물질 처리 용역

****************************

○ 계약기간 : 착수일로부터 25일

******************************************

- 예산과목 : 상수도사업비용,영업비용,정수비,수선유지교체비,수선유지비(정수장시설유지보수)

○ 계약방식 : 1인견적 수의계약

- 근    거 :「지방계약법 시행령」제25조제1항제5호(추정가격 2,000만원 이하 용역)

**********************************************************************************

□ 검토의견

○ 취급시설 미사용 및 장기보관에 따른 화학사고 발생대비 사전조치 필요

- 유해화학물질(황산,수산화나트륨)을 적정 처리(이송 및 반출)하여 화학사고 발생 가능성 완전 제거

○ 유해화학물질 납품경험이 있는 업체와 수의계약 추진하여 용역 안전수행

- 유해화학물질 취급 가능한 업체 중 용역 수행 가능한 업체를 찾아보았으나 고농도 황산(75%)을 취급하여야 함에 따라 타 업체에서는 용역 수행 기피

**************************************************************************************

□ 향후일정(예정)

○ 용역 계약의뢰 및 계약체결	~ ’19. 11

○ 수산화나트륨 이송, 황산 반출	~ ’19. 11

○ 물청소 및 발생폐수 처리	~ ’19. 11

○ 용역 준공처리	~ ’19. 12

붙임  1. 용역 과업내용서(안) 1부.

2. 업체 견적서 각 1부.

3. 산출기초조사서 1부.

4. 국민신문고 민원질의(민원 1AA-1908-232057) 1부.  끝.