문서번호	시설관리과-29176
결재일자	2019.11.14.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
시설안전팀장		시설관리과장
유세종		11/14 허준행
협 조
	주무관			이연한

2019-1 종로, 성북구 관내 상수도시설물 설치 및 보수공사

설계변경(1차)심의위원회 개최결과 보고

2019. 11.

중부수도사업소

시설관리과

설계변경 심의자료

2019-1 종로, 성북구 관내 상수도시설물 설치 및 보수공사 1차 설계변경 심의내용 보고.

가. 공 사 명 : 2019-1 종로, 성북구 관내 상수도시설물 설치 및 보수공사

나. 제    목 : 설계변경 심의 - 1차

다. 일    시 : 2019. 11. 14.(목) 10:30 ~ 11:30

라. 참 석 자 : ************************

*****************************

마. 공사개요

공 종	단 위	당 초	변 경	증,감
노후밸브교체	개소	151	171	증 20
밸브실 정비	개소	265	388	증 123
소화전보수	개소	42	15	감 27
시설물보수 및 환경정비	식	1	1	-

바. 공사기간 : 2019. 08. 19 ~ 2020. 06. 30

구 분	설계변경 현황			비고
	당 초	변 경	증 ․ 감
도급비	***********	***********	*

사. 공사금액

아. 설계변경 심의내용 : 아래 첨부

설계변경 심의내용

1. 공사현황

가. 공 사 명 : 2019-1 종로, 성북구 관내 상수도시설물 설치 및 보수공사

공 종	단 위	당 초	변 경	증,감
노후밸브교체	개소	151	171	증 20
밸브실 정비	개소	265	388	증 123
소화전보수	개소	42	15	감 27
시설물보수 및 환경정비	식	1	1	-

나. 공사개요

다. 공사기간 : 2019. 08. 19 ~ 2020. 06. 30

라. 수 급 인 : ************

2. 설계변경 사유 보고

가. 공사중 물량 증･감 사항 발생

- 물량증가 : 잔토소운반(인력상차비포함0.18터파기동시상차)2.5DT등 31개 공종

- 물량감소 : 콘크리트포장깨기 굴삭기(타이어) 0.18㎥등 74개 공종

나. 신공종 발생

- 신규공종 : 콘크리트포장깨기 굴삭기(타이어) 0.18㎥ 지세할증 등 11개 공종

3. 설계변경 검토결과

가. 도급액 범위내에서 물량변동

나. 신공종에 대해 낙찰율 적용

다. 최대이행금액 증액

붙임 : 심의의견서, 변경내역서 각 1부.  끝.