문서번호	기전설비과-11159
결재일자	2019.11.14.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
★주무관	기전설비과장	생산부장
이래운	조성태	11/14 유병기
협 조
	재무회계과장		김분숙
	시설과장		송병욱

□상수도사업본부 발족 30년, 수돗물 통수 111년, 믿고 마시는 아리수!”

「우면산아리수올림터 급수체계 개선공사」

관급자재(수충격완화설비) 납품기한 연기 보고

관급자재(수충격완화설비) 납품기한 연기 보고

2019. 11.

상수도사업본부

[생산부]

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	□	■
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사 등	□	■
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 분석 등	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등	□	■
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	□	■
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	□	■
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등	□	■
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	□	■

「우면산아리수올림터 급수체계 개선공사」

관급자재(수충격완화설비) 납품기한 연기 보고

우리 본부에서 추진중인「우면산아리수올림터 급수체계 개선공사」관급자재 (수충격완화설비)의 납품기한을 선행공정 지연으로 다음과 같이 연기하고자 함.

Ⅰ		사업개요

◯ 사 업 명 : 우면산아리수올림터 급수체계 개선공사

◯ 사업규모 : 양재아리수올림터 설치, 암사저양정 송수펌프 교체(7대)

송배수관 부설(D1,200~1,500, L=535m) 등

◯ 공사기간 : 2017.12.13.~2020. 5.30.

◯ 총사업비 : 14,005백만원(기전분야 사업비 : 4,485백만원)

◯ 시 공 사 : ㈜국정종합건설, (주)태광이엔씨 - 주계약자공동도급

◯ 감 리 사 : ㈜도화엔지니어링외 1개사

Ⅱ		관급자재 계약현황

◯ 건    명 : 양재아리수올림터 수충격완화설비 제작구매 설치

◯ 계 약 자 : ㈜에스엠테크(대표 양철수)

◯ 계약금액 : 금239,992,000원

◯ 계약기간 : 2019. 6. 25.~2019. 11. 22.

◯ 계약물품

물품명	규 격	단위	수량	비 고
수충격 완화설비	Air Chamber(45㎥)	식	1	현장설치도

Ⅲ		변경사항

◯ 납품기한 연기

물품명	계약업체	계약기간		비 고
		변경전	변경후
수충격 완화설비	㈜에스엠테크 (대표 양철수)	2019.6.25.~ 2019.11.22.	2019.6.25.~ 2019.12.16.	(증)24일

◯ 연기사유 : 선행공정 지연에 따른 납품기한 조정

- 수충격완화설비 기초콘크리트 강도 확보를 위한 양생기간(28일) 필요

콘크리트의 강도는 표준양생을 한 콘크리트 공시체의 재령 28일에서의 압축강도를 기준으로 한다.

(출처: 우면산가압장 공사시방서(토목분야) 시방서)

※ 콘크리트 타설 : ‘19.10.25. 양생완료 : ’19.11.22.

◯ 계약금액 : 변경없음

◯ 지연배상금 : 미부과(귀책사유:상수도사업본부)

Ⅳ		행정사항

◯ 납품기한 연기에 따른 변경계약 의뢰(재무회계과)

붙임  1.책임건설사업관리단 납품기한 요청 공문 1부.

2.계약자 합의서                         1부.  끝.