문서번호	공공재생과-12365
결재일자	2019.11.14.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		공공재생정책팀장	공공재생과장
김지호		신명승	11/14 이동일
협조

- 서울로2단계 연결길 조성 사업 관련 -

[서계2길]청파언덕길 환경개선 설계 용역 시행 계획

2019. 11

공공재생과

- 서울로2단계 연결길 조성 사업 관련 - [서계2길]청파언덕길 환경개선 설계 용역 시행 계획

서울역 일대 도시재생사업과 관련하여 서울로 7017 보행확장을 위해 추진 중인  서울로2단계 연결길 조성사업 중 서계2길 구간(청파언덕길 구간)에 대한 시범사업을 아래와 같이 시행하고자 함

Ⅰ				추진근거 및 배경		‘

□ 추진근거

○ 서울로2단계 연결길 조성 기본계획 수립(‘19.10.29)

○ 서울로2단계 연결길 조성 사업 실행계획 수립(‘19.10.31)

□ 추진목적

○ 서울역일대 도시재생사업(서울로2단계 연결길 조성)일환으로 추진되는 사업으로 청파언덕길 구간은 도시재생거점시설 조성 완료 등 연계사업이 집중되어 있고 주요 경관지역으로 지역활성화의 효과를 기대하는 지역주민의 요구가 높은 지역임

○  서울로7017 연계 보행 확장과 함께 노후 주거지인 서계동일대 환경개선을 통해 주민들의 생활환경 개선 및 지역활성화에 기여하고자 함

Ⅱ				현황 및 계획(안)		‘

□ 현   황

○ 위    치 : 용산구 청파로73길(서울로2단계 연결길 중 서계2길)

○ 규 모 : 연장(L)=177.2m (면적 1,126㎡)

(계단정비 1개소 포함 : 일부구간만(L)=16.3m (면적 50㎡)

□ 기본계획(안)

○ 청파언덕길 구간 내 민간건물 활용 야외 영화관 및 계단을 활용한 관람석 조성 (시민아이디어 공모시 제안 사항) ○ 주요 조망과 각 거점시설을 연결하는 포장 및 주변 건축물 입변개선 ○ 녹지 조성 및 경관 조명 설치 등

Ⅲ				용역시행		‘

○ 용 역 명 : [서계2길]청파언덕길 구간 환경개선 설계 용역

○ 과업대상 : 용산구 청파로73길(서울로2단계 연결길 중 서계2길)

********************

***********************************

*********************

○ 주요공사내용

- 토목설계 : 계단 1개소 정비, 도로포장 재정비 등

- 전기설계 : 경관조명, 보안등, CCTV 설치 등(필요시)

- 조경설계 : 골목화단 조성, 담장녹화 등(주민동의 및 필요시)

- 공공디자인 : 마을 환경개선(입면 및 통일감 있는 악세서리 반영),

커뮤니티 공유공간 및 휴게시설 설치(주민동의시)

○ 시행방법

- 설계용역은 공공건축가와 수의계약으로 진행

- 공사는 자치구에서 시행하되 해당설계자로 하여금 디자인감리를 할 수 있도록 조치

Ⅳ				추진일정		‘

○ ‘19.11.     : 기술용역타당성 심사

○ ‘19.11.     : 설계용역계약 및 착수

○ ‘20. 5.     : 주민협의, 골목스튜디오 참여 설계용역완료

○ ‘20. 5~11 : 공사발주 의뢰 및 착수, 준공

Ⅴ				행정사항		‘

○ 소요예산 : 총646,720천원

- 설계비 :     44,580천원

- 감리비 :       7,140천원

- 공사비 :    595,000천원

※ 사업비는 향후 조정될 수 있음

○ 예산과목 : 공공개발 및 공공공간 확충(도시개발), 서울역일대 도시재생사업 추진, 시설비

붙임 : 1) 방침서 1부.

2) 기술용역타당성 심사 요청서 1부.

3) 과업내용서 1부.

4) 설계내역서 1부.  끝.