문서번호	도시철도계획부-10059
결재일자	2019.11.14.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		계획과장	도시철도계획부장
이경훈		김동철	11/14 김진팔
협조

「쉴드TBM 활성화를 위한 경제성 확보 방안」

용역 과업내용 변경 검토 보고

2019. 11.

도시기반시설본부

(도시철도계획부)

「쉴드TBM 활성화를 위한 경제성 확보 방안」

용역 과업내용 변경(추가) 검토 보고

친환경·비배수 터널공법 적용에 따른 사회적 편익 등을 추가 검토하여 쉴드TBM의 사회경제적 효과를 제시함으로써 보다 정확한 경제성 분석이 이루어질 수 있도록 용역 과업내용을 변경하고자 검토한 보고임.

*********************************

□		용역개요

❍	용역명	:	쉴드TBM 활성화를 위한 경제성 확보방안
❍	계약자	:	(사)한국터널지하공간학회
❍	계약기간	:	′18. 6. 1. ~ ′19. 11. 30.
❍	계약금액	:	184,651,000원
❍	과업내용	:	쉴드TBM 장비·부품, 세그먼트 경제성 확보방안 수립 쉴드TBM 최적공사비 산출기준(안) 마련 등

□ 추 진 현 황

❍	'18.03.30	:	용역시행방침 수립 및 기술용역 타당성 심사
❍	'18.06.01	:	용역계약 체결
❍	'19.03.28	:	용역 중간보고회 (국장 보고)
❍	'19.07.15	:	용역 추진현황 보고회 개최 (본부장 보고)
❍	'19.07.26	:	용역 검토내용에 대한 현장 실무자와의 의견 교류 (장비분야)
❍	'19.08.23	:	용역 검토내용에 대한 현장 실무자와의 의견 교류 (내역분야)
❍	'19.09.09	:	용역 추진현황 및 향후 계획 보고 (본부장 방침) - 쉴드TBM 적용에 따른 사회적 편익분석 등 추가과업 시행
❍	'19.09.24	:	TBM 정비사업소(호반건설) 현장 견학

□		보고내용

❍ 쉴드TBM 공사비 중 주요공정인 ①장비 및 부품, ②세그먼트 라이닝, ③굴진 공사비 분야에 대해 경제적 설계 방안 및 최적 공사비 산출기준을 마련****************************************************************

⇨ 쉴드TBM의 경제성 확보를 위해서는 비배수 공법에 따른 사회적 편익 및 단면 사공간(무효공간) 활용방안 등에 대해 추가 분석 필요

검 토 분 야	검 토 내 용
1) 장비 및 부품 분야 ********************* ***********************	****** *********
2) 세그먼트 라이닝 분야 **************** ****************************	******** *********
3) 최적 공사비 분야 **************************** *****************************	************ ******
*********************** ********************** *****************************	******* ************* ******

❍ 사용예산 : 지정기탁금 사용 (50,000천원)

- 기탁금 현황 -

· 기 탁 자 : HerrenKnecht(헤렌크넷, 독일 쉴드TBM 장비 제작사)

· 기탁사유 : 쉴드TBM 기술발전을 위한 연구 진행 등 기술발전에 기여

· 기 탁 금 : 59,000천원 (‘19.7.11 세입조치)

□		조치계획

❍ 「쉴드 TBM 활성화를 위한 경제성 확보방안 용역」을 아래와 같이 친환경·비배수 터널공법 적용에 따른 사회․경제적 효과를 추가로 분석하여 보다 면밀한 경제성 분석이 이루어질 수 있도록 용역 과업내용을 변경하고자함.

- 추가과업 : 쉴드TBM 공법에 따른 사회경제적 편익 및 단면 사공간(무효공간) 활용방안

- 변경내용

구 분	당 초	변 경	증․감
용 역 비	184,651,000원	234,651,000원	증)50,000,000원
용역기간	‘18.06.01~‘19.11.30	‘18.06.01~‘20.05.31	6개월 연장

❍ 사용예산 : 도시기반시설본부, 도시철도건설, 도시철도건설사업(도시철도특별회계), 쉴드TBM 기술발전 방안 마련, 시설비

붙임 : 1) 용역 추진현황 및 향후계회 (본부장 방침) 1부.

2) 합의각서(과업추가) 1부.

3) 산출내역서 1부.

4) 예정공정표 1부.  끝.