＂상수도사업본부 발족 30년, 수돗물 통수 111년, 믿고 마시는 아리수!＂
	강남수도사업소
수신	서울시설공단이사장
(경유)
제목	현장실정보고에 따른 검토 회신(내곡지구 이중화 배관부설공사)

1. 서울시설공단 공사감독2처-17745(2019.11.12.)호와 관련입니다.

2.「***************」현장실정보고 제출건에 대해 검토 후 아래와 같이  회신   하오니 공사 시공감독 업무에 만전을 기하시기 바랍니다.

-   아     래    -

검 토 사 항	처리의견
○ 시점부 부단수분기(D600/500mm) 위치 변경 시공 - 기존관 D600mm 부설된 위치에서 분기	승인

끝.

	강남수도사업소장
시설운영팀장	전동근		시설관리과장	11/15 정재현
협조자
시행	시설관리과-23989	(		)	접수		(		)
우	06300	강남구 양재천로 199(도곡동)	/
전화	02-3146-4906	/전송	02-3146-4939	/		/	부분공개(7)