문서번호	기전과-12631
결재일자	2019.11.15.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		기전과장	서부도로사업소장
정법관		서수일	11/15 이학구
협조
	주무관		김성균

서부도로사업소 청사 태양광발전설비 공사 설계변경 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2019.  11.

서부도로사업소

(기전과)

서부도로사업소 청사 태양광발전설비 공사 설계변경 보고

우리사업소 청사 태양광발전설비 설치공사 업무 수행 중 시공업체로부터 공종물량 증감 및 신규공종 추가에 대한 실정보고가 있어 검토 후 설계변경 추진하고자 함.

관련 근거

□ 베스트11-01호(2019.11.14) : 실정보고 제출 건

공사 개요

□ 공  사  명 : 서부도로사업소 청사 태양광발전설비 공사

□ 공사 위치 : 서부도로사업소 청사(전기실, 창고동)

□ 계약 금액 : ************

□ 계  약  일 : 2019. 09. 11.

□ 착  공  일 : 2019. 09. 18.

□ 준공 기한 : 2019. 12. 16.

□ 계약상대자 : ********************

□ 주요 공사 내용

- 사업소 청사 창고동(염화칼슘 보관동) 옥상 태양광설비 설치 및 전기실

수배전반 교체 설치

설계변경 사항

□ 금액 변경

(단위 : 원)

구 분		변 경 전	변 경 후	증 · 감
총 공 사 비		**********	**********	**********
도급비	공급가액	**********	**********	-*********
	부가가치세	*********	*********	-*******
	계	**********	**********	**********

- 예산과목 : 도로관리과, 도로시설물관리, 도로 및 도로부속물관리, 공공청사                        (도로사업소) 태양광 설치, 시설비

□ 설계변경 사유 및 물량변경

- 서울시 도로관리과 변경설계도서 검토결과 신설되는 배전반에서 기존 배전반

MOF 1차측 특고압케이블 단말처리 불가하여 수전설비 변경으로 감액

- 당초 설계내역서의 경비(건강보험료, 연금보험료, 노인장기요양보험료),       일반관리비, 이윤감액

조치 의견

□ 계약상대자로부터 실정보고서 접수 후 내용검토 결과, 현장 여건에 따라 공종물량을 재산출하여 증감 반영하고,

□ 원활한 공사진행 및 구조적 안정성을 확보하고자 변경하는 내용을 반영하여 설계변경하는 것이 타당하다고 판단됨.

향후 계획

□ ’19. 11. 20. : 변경계약 의뢰

□ ’19. 11. 29. : 준공 및 준공검사

붙임  1. 실정보고서 1부.

2. 설계변경내역서 1부.  끝.