투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신자	총무부장
(경유)
제 목	공사 설계변경 시행(전체8회3차제1회)

우리부에서 시행중인「노들섬 특화공간조성 토목공사」에 대하여 아래와 같이 설계변경(전체8회3차제1회)을 시행코자 합니다.

1. 공 사 명 : 노들섬 특화공간조성 토목공사

2. 공사기간 : ‘17.11.15 ~ ’19.11.15

3. 공 사 비 : 7,640백만원(3차:2,241백만원)

4. 도 급 자 : 신성종합건설(주)

5. 예산과목 : 공공재생계획수립,공공개발및공공공간확충(도시개발특별회계),노들섬문화명소조성사업,시설비및부대비,시설비

6. 설계변경내역

○ 변경내용                                                     (단위 : 천원)

구 분	당 초	변 경	비 고
전체공사	7,640,962	8,499,460	증)858,498
3차공사	2,241,304	3,099,802	증)858,498

7. 준공기한 : 변경없음

붙 임 1) 보고서 1부.

2) 설계서 2부.  끝.

	토목부장
★주무관	박상철		도시고속도로과장	代이상욱A		토목부장	11/15 김용제
협조자	재무예산과장	홍수열
시행	토목부-20832	(		)	접수		(		)
우	04520	서울시 중구 청계천로 8 프리미엄 플라이스 빌딩 12층	/	http://infra.seoul.go.kr
전화	02-3708-8662	/전송	02-3708-2599	/	scpark555@seoul.go.kr	/	부분공개(5)