문서번호	한양도성도감-11795
결재일자	2019.11.15.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
★주무관		도성보존팀장	한양도성도감과장
구선이		곽동진	11/15 안중호
협조

<한양도성 혜화문 보수 공사>

설계변경(정산) 검토 보고

2019. 11.

문 화 본 부

한양도성도감

공사 설계변경(정산) 검토 보고

한양도성 혜화문 보수 공사에 다음과 같이 변경사항이 있어 제출된 정산보고 사항에 대한 설계변경(계약금액 조정)을 추진코자 함

공사개요

○ 공 사 명 : 한양도성 혜화문 보수공사

○ 공사기간 : 2019. 7. 4. ~ 2019. 11. 24.

○ 계약금액 : 금143,875,000원

○ 시 공 자 : 한옥협동조합(대표:장남경)

추진경위

○ 2019. 3. 5. ~ 4. 13. : 혜화문 보수공사 설계용역 실시

○ 2019. 7. 8. : 혜화문 보수공사 착공

○ 2019. 8. 12. : 시공자 실정보고 제출(공사내용 및 공사비 변경)

○ 2019. 8. 28. : 실정보고 승인

○ 2019. 9. 18. : 시공자 설계변경 요청

○ 2019. 9. 30. : 1차 설계변경(공사금액 및 기간 변경)

○ 2019. 11. 22. : 시공자 정산보고 제출(공사내용 및 공사비 변경)

변경사항

○ 계약기간 변경 : 변경 없음

○ 계약금액 변경 : 금143,875,000원→ 136,393,770원(감 7,481,230원)

※ 단가 적용기준(계약단가)

○ 변경사유

1) 보험료 정산

공종	변경전	변경후	검토 결과
산재보험료	2,268,367원	**********	********
고용보험료	********	********	********
국민 건강 보험료	**********	**********	*********
국민 연금 보험료	**********	********	*********
노인 장기요양 보험료	********	********	********
산업안전 보건관리비	**********	**********	*********

2) 공사내용 변경 : 공사 물량 증감 및 자문비 정산

- 공사 시행 중 지붕 양성마루 해체시 내부의 적새를 보존하면서 해체하기에 어려움이 있어, 기존 양성바름을 존치하면서 양성 바르기를 실시함에 따라 교체되는 기와 및 양성해체 수량 변동

- 문루 출입을 위한 엽문 앞 바닥 강회다짐 추가

공종	변경전	변경후	검토 결과
생석회 잡석다짐 철거	5.390㎥	6.100㎥	물량 조정(증가)
생석회 잡석다짐	5.390㎥	6.100㎥	물량 조정(증가)
한식기와(여와(중))	568매	426매	물량 조정(감소)
한식기와(부와(중))	227매	85매	물량 조정(감소)
장식기와 해체(용두, 잡상)	32개소	10개소	물량 조정(감소)
장식기와 설치(용두, 잡상)	32개소	10개소	물량 조정(감소)
양성 해체	39.230㎡	9.808㎡	물량 조정(감소)
시멘트 운반비	54.270포	58.170포	물량 조정(증가)
기와 운반비	833.870매	549.870매	물량 조정(감소)
진흙, 백토 운반비	20.940㎥	4.280㎥	물량 조정(감소)
폐기물 상차	7.130㎥	16.480㎥	물량 조정(증가)

3) 자문비 정산 : 자문 1회 실시로 자문비 정산(감액)

○ 원가계산서

구분		당초	변경	증 감(-)	비고
순공사원가	재료비	**********	**********	********
	노무비	**********	**********	**********
	경비	**********	**********	**********
순공사비 계		***********	**********	**********
일반관리비		*********	*********	********
이윤		**********	*********	********	****************************
수리보고서		*******	*******
폐기물처리비		*******	*******	******
경관조명 철거 및 설치공사		*********	********
자문회의비		*******	*******	********	********
공급가액		***********	***********	**********
부가가치세		**********	**********	********
도급액		***********	***********	**********
총공사비		***********	***********	**********

향후 계획

○ 상기의 변경 사항으로 계약변경(정산) 후 공사 시행 및 완료

붙임  1. 시공자 설계변경 보고서 1부.  끝.