문서번호	계약심사과-9245
결재일자	2019.5.16.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		토목심사2팀장	계약심사과장
박홍		노형근	05/16 김수정
협 조
	전문관			정대진
	건축심사팀장			서홍일

서울애니메이션센터 재건축공사 실시설계 설계VE·계약심사 통합심사 실행계획

2019. 5.

계약심사과

서울애니메이션센터 재건축공사 실시설계

설계VE·계약심사 통합심사 실행계획

도기본(건축부) 시행「서울애니메이션센터 재건축공사 실시설계」에 대해 VE전담팀을 구성하고, 설계VE·계약심사 통합심사를 추진하고자 함.

1		추진 근거

□ 건설기술진흥법 시행령 제75조

□ ‘19년 설계경제성(VE) 심사 운영계획(계약심사과-4339, ’19. 3. 7.)

□ 실시설계 경제성(VE)·원가통합 심사 의뢰(건축부-8112. ‘19. 5. 15.)

2		심사 개요

□ 신청부서 : 도시기반시설본부(건축부)

□ 사 업  명 : 서울애니메이션센터 재건축공사 실시설계

□ 위    치 : 중구 예장동 8-145외 3필지

□ 사업내용 : 교육연구시설, 문화 및 집회시설, 근린생활시설

- 부지면적 : 8,473㎡

- 규    모 : 지하4층 / 지상3층, 연면적 15,930.29㎡

□ 공 사 비 : 57,058백만원

□ 사업기간 : ’15. 10. ~ ’22. 6.

□ 설계공정률 : 93%

3		심사 계획

□ 주요 심사 내용

○ 건설공사의 설계, 시공, 유지관리 등 경제성 분석

○ 공사 시행의 적정성 및 사용자 편의성

○ 시설물 안전 및 고효율 공법 적용의 가능성 등

○ 설계예산서 도서간 일치 여부 및 공사원가 적정성 등

□ 시행 방법 : VE전담팀을 구성하여 심사

○ VE전담팀, 발주부서, 설계사, 유지관리부서 등 20명 내외

구성원	구성내용	역할
VE리더	▸ 박흥민 위원 ㈜에스티이엔지	․ 워크숍 준비, 진행 ․ 결과보고서 작성
진행보조요원	▸ 남궁혁 위원 ㈜에스티이엔지
VE업무총괄	▸ 노형근 토목심사2팀장 계약심사과	․ 설계VE 계획, 회의지원 등
VE업무담당	▸ 박홍 주무관 계약심사과
외부 검토위원 (7개 분야)	▸ (건축계획) 빈혜진 위원 다옴스페이스 ▸ (건축시공) 오재화 위원 ㈜도원엔지니어링 ▸ (토 질) 이동일 위원 ㈜유신 ▸ (조 경) 이두열 위원 EM디자인 ▸ (전 기) 김명렬 위원 인천공항에너지 ▸ (기 계) 정남기 위원 ㈜두인이앤지 ▸ (통 신) 권규철 위원 테크뱅크	․ 기능 분석 ․ 기술 검토 ․ 아이디어 제안 ․ 아이디어 평가 ․ 제안서 작성
내부 검토위원 (5개 분야)	▸ (건축) 박태욱 주무관 계약심사과 ▸ (토목) 임홍필 주무관 계약심사과 ▸ (조경) 배명권 주무관 계약심사과 ▸ (전기) 정대진 주무관 계약심사과 ▸ (기계) 김경일 주무관 계약심사과	․ 설계도서 형식 검토 ․ 계약심사
유지관리부서	▸ 박주현팀장 서울산업진흥원(SBA)	․ 유지관리 특이사항 등 설명
사업의뢰부서	▸ 임형준 사무관 거점성장추진단	․ 중점검토 요청사항 등 설명
발주부서	▸ 김찬유 주무관 도기본(건축부)	․ 사업설명, 제안서 검토
설계자(7명)	▸ 김승국 공간종합건축사사무소 ▸ 분야별 설계자	․ 사업설명회 준비 ․ 제안서 원가분석 등

□ 설계VE․계약심사 통합심사 회의 세부일정

일 시	내 용
’19.5.29.(수) 10:00~17:00	- 사업설명 및 현장답사, 기능분석・정리 ‣ 장소 : 계약심사과 內 회의실 및 현장
’19.5.30.(목) 10:00~17:00	- 검토회의 : 대안 구체화, 설계도서 형식검토 ‣ 장소 : 계약심사과 內 회의실
’19.6. 5.(수) 10:00~17:00	- 최종검토회의 : 제안 채택회의, 설계도서 보완 통보 ‣ 장소 : 계약심사과 內 회의실
’19.6.21(금)	- 설계도서 수정본 제출 (도기본 ⇒ 계약심사과)
’19.7.2(화)	- 설계VE․공사원가 통합심사 결과 통보 (계약심사과 ⇒ 도기본)

□ 설계VE·계약심사 통합심사 시행절차

구분		추진 일정		수행 절차		추진 내용
계획수립		’19.5.15.		설계경제성 심사 신청 (발주부서)		▸ 심사 신청서 접수
		’19.5.16.		설계VE․계약심사 통합심사 계획수립 (계약심사과)		▸ 추진일정, 시행방법 등 ▸ 설계VE팀 구성
설 계 VE ․ 계 약 심 사 통 합 심 사 운 영		’19.5.29. ~ ’19.6.5. (1일차~8일차)		설계VE 검토회의 【설명회,워크숍,이행회의】 (VE전담팀)		▸ 자료 사전검토(도서배부 5/3) ▸ 사업설명 및 현장답사 ▸ 1,2차 워크숍 - 대안발굴, 제안서 작성 - 설계예산서 검토 - 설계제안 채택회의 ▸ 최종 검토회의 : 의사결정
		’19.6.7. (10일차)		VE 제안서 통보 (계약심사과 → 발주부서)		▸ VE 제안서 통보
		’19.6.21. (24일차)		설계도서 수정 및 제출 (발주부서 → 계약심사과)		▸ 설계도서 수정 및 제출
		’19.6.21. ~ ’19.7.1. (34일차)		계약심사 (계약심사과)		▸ 분야별 계약심사 ▸ 설계VE 결과보고서 작성
		’19.7.2. (35일차)		통합심사 결과통보 (계약심사과 → 발주부서)		▸ 심사결과 통보

4		소요예산

□ 소요예산 : 11,785천원

○ 외부위원 수당 : 11,285천원

- VE리더(기술사+보고서작성)  : 2,473천원(2,473천원 × 1명)

- 검토위원(기술사)           : 7,973천원(1,139천원 × 7명)

- 진행보조요원(중급기술자)    : 839천원(839천원 ×1명)

※「설계VE 위원 수당 지급기준 개선 계획」(계약심사과-15310, ’18.9.20)에 따라 산출

○ 회의다과비 등 운영비 : 500천원

□ 지급부서

○ 위원  수당 : 신청부서(도시기반시설본부[건축부])

○ 회의운영비 : 계약심사과

5		향후계획

□ 설계경제성 및 통합심사 결과 통보 ---------  ’19.7.2.

붙   임 : 1. 설계경제성 심사 요청 공문 1부.

2. 설계경제성 심사 신청서 1부.  끝.