문서번호	계약심사과-9354
결재일자	2019.5.17.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	토목심사2팀장	계약심사과장		재무국장
설상운	代소영신	김수정		05/17 하철승
협 조

서울 시네마테크 건립공사 기본설계 설계 경제성 심사 결과보고

2019. 5.

재  무  국

계약심사과

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	□	■
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사 등	□	■
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 분석 등	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등	■	□	시설물 안전관리 검토
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	□	■
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	□	■
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등	□	■
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	□	■

서울 시네마테크 건립공사 기본설계

설계 경제성 심사 결과보고

도시기반시설본부(건축부) 시행 「서울 시네마테크 건립공사 기본설계」에 대한 설계 경제성 심사 결과를 보고 드림

1		사업개요

□ 신청부서 : 도시기반시설본부(건축부)

□ 용  역  명 : 서울 시네마테크 건립공사 기본설계

□ 위    치 : 중구 마른내로 38

□ 사업내용 : 문화 및 집회시설

- 부지면적 : 773.5㎡

- 규    모 : 지하3층/지상10층, 연면적 4,839.9㎡

□ 공 사 비 : 23,997,060천원

□ 용역기간 : ’18. 5. ~ ’19. 8.

□ 설계공정률 : 50%

2		심사개요

□ 심사기간 : ’19. 4. 23. ～ ’19. 5. 3.(기간 중 3일)

□ 장      소 : 계약심사과 회의실 및 사업 현장

□ 전문가구성 : 9명(외부전문가 8명, 내부공무원 1명)

□ 심사내용

- 건설공사의 설계, 시공, 유지관리 등 경제성 분석

- 공사 시행의 적정성, 시설물 안전성 검토

- 시설물 안전 및 이용자 편의성 반영 등

3		심사결과

① 성능향상 : 아이디어 60건을 제안하여 48건 채택【채택률 80%】

② 비용절감 : 공사비  23,997,060천원에서 1,614,880천원 절감【절감률 6.73%】

□ 설계VE 검토결과

- 유형별 제안건수 및 절감액

(단위: 건, 천원)

	안전성 강화	건 수	10
		절감액	353,140
	시공성 향상	건 수	21
		절감액	962,040
	유지관리성 향상	건 수	4
		절감액	218,560
	편의성 향상	건 수	5
		증 액	4,050
	예산절감	건 수	2
		절감액	85,190
	설계 보완	건 수	6
		절감액	-

- 비용절감 및 가치향상

(단위: 점, 천원)

비 용(C)			성 능(P)			가 치(V=P/C)
공사비	절감액	절감률	원안	대안	개선율	원안	대안	향상률
23,997,060	1,614,880	6.73%	100	123.79	23.79%	100	132.68	32.68%

- 주요 대안내용

1)【유지관리성 향상】우수조, 정화조 외부트렌치와 간이 집수정 설치 (트렌치,집수정 미설치 → 설치) ․ 증액 : 0.56백만원 ⇒ 기계식 주차장 습기 및 냄새제거	↓

2)【편의성 향상】각종 화장실 청소도구함 설치 (청소도구함 미설치 → 설치) ․ 증액 : 0.57백만원 ⇒ 청소도구함 설치로 편의성 향상	↓

3)【안전성 강화】옥상(10층)의 완강기를 구조대로 변경 (완강기 → 구조대) ․ 증가액 : 5.38백만원 ⇒ 다수 인원 피난이 용이한 구조대로 변경하여 안전성 강화	↓

4		행정사항

□ 설계경제성 심사 결과통보(도시기반시설본부) : ’19. 5. 20.(월)

붙임 1. 설계경제성 심사 제안 채택목록(60건) 1부.

2. 설계경제성 심사 결과 보고서(별도송부) 1부.

3. 설계경제성 심사 참여자 목록 1부.  끝.