문서번호	한양도성도감-11781
결재일자	2019.11.15.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
★주무관		도성보존팀장	한양도성도감과장
구선이		곽동진	11/15 안중호
협 조

서울 DDP내 한양도성 성벽 정비 공사

건설 폐기물 처리용역 준공기한 변경 검토보고

2019. 11.

문 화 본 부

한양도성도감

준공기한 변경 검토 보고

『서울 DDP내 한양도성 성벽 정비 공사 건설 폐기물 처리용역』의 계약과 관련하여 계약자로부터 준공 기한 변경요청이 있어 검토 결과를 보고 드림

Ⅰ		계약내용

□ 계약건명: 서울 DDP내 한양도성 성벽정비 공사 건설 폐기물 처리 용역

□ 계약업체: ㈜삼보환경(대표:김완기)

□ 계약금액: 18,698,500원

□ 준공기한: 2019. 7. 16. ~ 2019. 11. 22.

□ 착공일자: 2019. 7. 26.

Ⅱ		검토내용

□ 연기기한: 2019. 12. 12.(연장 20일)

□ 연기사유 귀책소재: 서울특별시

□ 지체상금 부과여부(부과, 미부과) : 미부과

□ 연기사유

- 현재 진행중인 서울 DDP내 한양도성 성벽정비 공사의 계약변경(공사 기간 연장)으로 인해 폐기물 처리 기간이 추가 소요되어 기간 연장

Ⅲ		처리의견

□ 서울 DDP내 한양도성 성벽정비 공사에 차질이 없도록 계약기간을 변경 처리 하고자 함

붙임: 준공연기 합의 각서 1부.  끝.