문서번호	체육정책과-14043
결재일자	2019.11.15.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관	체육시설팀장	체육정책과장
박성희	박상수	11/15 代김가영

*********************

***********

2019. 11.

관광체육국

(체육정책과)

*********************

***********

*********************************************************

□ 사업개요

❍ 대지위치 : 노원구 상계동 1268(수락산역 환승주차장)

❍ 지역/지구 : 일반상업지역 / 제1종지구단위계획, 중점경관관리구역

❍ 대지면적 : 5,100.7㎡

❍ 규    모 : 지하2층, 지상3층 (연면적 14,200㎡)

❍ 주요시설 : 체육시설(볼링장 32레인, 수영장 10레인 등), 환승주차장(161면)

❍ 설 계 비 : 2,008백만원

❍ 설 계 자 : 다니엘 바예(스페인 건축사), 자인건축사사무소(정대교 건축사)

❍ 설계기간 : ’19.11 ~ ’20.11.

□ 추진경위

❍ ‘15.06.~10. : 서울 어울림체육센터 건립 타당성조사 용역

❍ ‘16.10.25.   : 서울시 투자심사 (조건부 통과)

- 장애인·비장애인이 함께할 수 있는 사업 및 구체적인 운영프로그램 계획수립 등

❍ ‘16.12.07.   : 환승주차장부지 체육시설 건립관련 협의(주차계획과)

- 유상이관, 기존 주차면(159면)유지, 공사기간 중 대체주차장 마련

❍ ’17.08.18.   : 중앙투자심사 (조건부 통과)

- 자체 타당성조사 비용·수요·편익추정은 지방투자사업센터 지침 적용 보완

- 비용 최소화되도록 운영효율화 방안마련 수정․보완하여 2단계 심사

❍ ’17.09.26.   : 공유재산심의회 심의 (적정)

❍ ’17.11.28.   : 시의회 공유재산관리계획 심사 (가결)

❍ ’18.02.06.   : 노원구 시설확대 요청

- 볼링장 증설(10레인→32레인) / 수영장·다목적체육관 층고 조정

- 주차장 조성(주차타워·필로티→지하3층) / 지상1층에 편의점 등 설치

❍ ’18.05.10.   : 공유재산심의회 재심의 (조건부 적정)

- 건축설계시 증축 가능성 고려한 설계 반영 등 면밀히 검토 후 추진

❍ ’18.09.05.   : 시의회 공유재산관리계획 재심사 (가결)

❍ ’19.05.17.   : 설계공모 공고 (당선작 발표 ’19.6.27)

❍ ’19.07.05.   : 계약체결 및 사업추진 의뢰 (체육정책과→도기본)

❍ ’19.07.12.   : 설계용역 계약 의뢰에 대한 회신(도기본→체육정책과)

- 공모당선작 건축규모 대비 기존 공사비 부족하므로 적정 공사비 확보 필요

❍ ’19.07.~09. : 관계 기관 및 부서 협의(체육정책과,도기본,노원구,용역업체)

- 연면적 증가(670㎡), 물가 인상분 반영 등을 위한 적정 공사비 검토

❍ ’19.10.23.   : 서울 어울림 체육센터 건립 변경 계획

□ 용역 계획

❍ 관련근거

- 도시교통정비촉진법

- 교통영향분석 및 개선대책 수립지침(국토해양부 고시 제2016-29호)

- 서울특별시 교통영향평가에 관한 조례

❍ 주요내용

- 계약방법 : 수의계약

- 수의계약 대상자

․업 체 명 : ㈜ 명성   대표자  김지현, 문남식

․주    소 : 서울시 강동구 강동대로 143-22,  4층 402호(성내동)

․전화번호 : ☏ 02-475-1025

․선정사유 : 여성기업으로서 수의가격범위 내의 추정가격 2천만원 초과

5천만원 이하이며, 관련 분야의 전문성․참여도 및 이해도가   높아 교통영향평가의 원활한 추진 및 효율적 시행 가능하여   ㈜명성과 수의계약 체결.

- 소요예산 : 55,000천원(VAT 포함)

※ 예산과목 : 관광체육국 체육정책과, 시민체육 및 국제스포츠 진흥발전,

시민체육공간 확충, 서울 어울림 체육센터 건립, 시설비 및

부대비, 시설비 (100-401-01)

□ 추진일정

❍ 2019. 11. : 기술용역타당성 심사(기술심사담당관)

❍ 2019. 11. : 용역계약

❍ 2020. 12. : 교통영향평가용역 완료

붙임 : 1. 설계내역서.

2. 과업내용서.  끝.