문서번호	토목부-20932
결재일자	2019.11.18.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		교량건설과장	토목부장
권해엽		장종환	11/18 김용제
협조	주무관		노순재
	주무관		황윤기

방음벽 차단막 설치 검토보고

- 동부간선도로 확장공사(1공구) -

2019. 11.

도시기반시설본부

(토목부)

방음벽 차단막 설치 검토보고

- 동부간선도로 확장공사(1공구) -

투명방음벽 설치와 관련하여 지역 주민들이 차량 불빛 등으로 피해를 받고 있어 이를 해결하고자 방음벽 차단막 설치를 검토 후 보고드림.

※ 관련근거 : 도화(동부간선) 2019-176호(2019.08.27.)

Ⅰ		공사개요

○ 공 사 명 : 동부간선도로 확장공사(1공구)

○ 공사규모 : 도로확장 4차로→6차로, 연장 1,400m

○ 도 급 비 : 29,231백만원(7차 8,000백만원)

○ 공사기간 : ′08.12. ~ ′21.06.(7차 ′19.01. ~ ′19.12.)

○ 시 공 사 : ㈜풍산건설 외 1  /   감 리 사 : ㈜도화엔지니어링

Ⅱ		감리단 검토내용

○ 검토배경

- 학여울 청구아파트 일부(103동, 105동)는 동부간선도로보다 아래에 위치하여 차량 불빛 등으로 인한 지역주민 불편을  해결하고자 방음벽 차단막 설치를 보고드림.

○ 추진경위

- 2018.01.31. : 학여울 청구아파트 방음벽 주민설명회 개최

· 주민요구사항 : 추후 입주자 요청 시 사생활 보호필름 설치

- 2018.06.25. : 학여울 청구아파트 투명방음벽 공사 착수

- 2019.03.31. : 학여울 청구아파트 투명방음벽 공사 완료

- 2019.07.19. : 방음벽 복구 공사 시 방음벽 차단막 설치 및 화단조성 요청의 건

· 차량 불빛 차단을 위한 103동 및 105동 방음벽 차단막 설치 요청

○ 위치도 및 전경

※ 동부간선도로 통행차량 불빛 등으로 인하여 주민불편 발생

○ 조치방안 검토

구 분	칼라강판 부착시공 (아이보리색)	칼라유리 방음판설치	목재형 방음판 설치
공사량	81경간	81경간	81경간
공사비	13백만원	16백만원	49백만원
선정안	○

○ 단가적용

구 분	주 요 내 용	비고
신규비목	○ 지방계약법 시행령 제74조(설계변경으로 인한 계약금액의 조정) 제4항의3호「지방자치단체에서 설계변경을 요구한 경우(계약상대자에게 책임 없는 사유로 인한 경우를 포함)」에 의거 “계약대상자의 책임 없는 사유”에 해당하므로 신규 협의단가 적용. ○ 견적가 협의율 적용 ▷ 신규단가 적용 : 83.982%(협의율적용)	적용

○ 공사 물량 및 공사비 증·감 현황                         (단위 : 천원)

구 분	수량	단위	금 액		증⋅감	비 고
			당 초	변 경
1. 칼라강판 설치	**	**	*	******	******
제 경 비	*	*	*	***	***
공급가액			*	******	******
부가가치세	*	*	*	*****	*****
도급비계			*	******	******

○ 감리단 종합의견

- 학여울 청구아파트 103~105동의 투명방음벽에 야간 차량 불빛 등으로 인한 지역주민 불편을 해소하고자 요구사항을 반영하여 경제적인 칼라강판을 부착 시공함이 적정할 것으로 사료되며,

- 공사의 원활한 진행과 주변민원 해소를 위해 우선 시행조치하고 향후 설계변경 시 반영함이 타당하다고 사료됩니다.

Ⅲ		조치계획

○ 감리단의 검토의견과 같이 지역주민들의 불편을 해소하고자 방음벽 차단막을 우선 설치하고 추후 설계변경을 통하여 내역에 반영하고자 함.

붙임  1. 감리단 검토 의견서 1부.

2. 주민 요청 공문 1부.  끝.