문서번호	기전과-6463
결재일자	2019.11.18.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
★주무관		기전과장	남부도로사업소장
이중현		임태수	11/18 김영삼
협조
	주무관		이태근

『2019년 교통사고 잦은 곳 개선 교통신호지주 구매(2차)』

물 량 변 경  검 토 보 고

2019. 11.

남부도로사업소

( 기  전  과 )

『2019년 교통사고 잦은 곳 개선 교통신호지주 구매(2차)』

물 량 변 경  검 토 보 고

2019년 교통사고 잦은 곳 개선 교통신호지주 구매(2차)와 관련하여, 책임감리원 물량변경 요청에 대한 검토결과를 보고합니다.

Ⅰ
		사 업 개 요

□ 계 약 명 : 2019년 교통사고 잦은 곳 개선 교통신호지주 구매(2차)

□ 계약금액 : ******************************

□ 계약업체 : **************

□ 납품기간 : 2019. 8.19. ~ 11. 30.

□ 책임감리업체 : *************

Ⅱ
		구매변경사항

□ 주요 물량변경 내역

구분	당초			변경
	지주(본)	부착대(본)	조가선(set)	지주(본)	부착대(본)	조가선(set)
수량	15	16	16	16	16	16

※ 관악구 봉천동 1655-1(까치고개)부근
- 통합지주1본(교통/보행) →  지주2본(보행1, 교통1)

□ 변경사유

○ 기존 통합지주(교통/보행) 위치는 보도가 협소하고, 통합지주 부피가 커서 보행에 불편을 주므로 부피가 적은 보행지주로 분리설치

- 교통신호등 시안성 확보에 더 좋은 위치로 교통지주 분리설치

□ 변경금액                                          (단위:원)

구 분		당 초	변 경	증·감
구매금액	공급가액	***********	***********	*********
	부가가치세	**********	**********	*********
	합 계	***********	***********	**********

□ 책임감리원 기술검토 의견

○ 2019년 교통사고 잦은 곳 개선 교통신호지주구매(2차)와 관련, 현장여건을 반영하여 납품한 지주물량으로 물량변경이 필요하다고 사료됨.

※ 책임감리업체 태영알앤디 태영(신)2019-163(2019. 11. 8.)

Ⅲ
		보 고 자 의 견

□ 책임감리원 구매 물량변경 요청에 대한 검토 결과

○ 통합지주를 현장에 맞게 보행, 교통지주로 분리 설치하는 것이 타당하므로, 책임감리원 물량변경 요청에 대해 승인 하고자 함.

Ⅳ
		향 후 계 획

□ 2019. 11. 20. : 계약변경 시행

□ 2019. 11. 30. : 준공

붙 임 : 1. 책임감리원 물량변경 요청서 1부.
2. 합의각서 1부  끝.