문서번호	원수관리과-1616
결재일자	2019.11.18.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		원수관리과장	강북아리수정수센터소장
김종원		정임근	11/18 서대훈
협 조
	주무관			김효준

“상수도본부 발족 30년, 수돗물통수 111년, 믿고 마시는 아리수!”

『강북통합취수장 조류차단막 및 오일휀스 철거·설치 공사』

설계 변경 시행 보고

2019.  11.

강북아리수정수센터

(원수관리과)

『강북통합취수장 조류차단막 및 오일휀스 철거·설치공사』

설계 변경 시행 보고

『조류차단막 및 오일휀스 철거·설치 공사』시행중 현장여건 및 법령에 따른 신규공정·제경비 등의 변경사항이 발생하였기 설계변경을 하고자 보고 드림.

□ 공사개요

○ 공 사 명 : 2019년 강북통합취수장 조류차단막 및 오일휀스 철거·설치 공사

○ 공사기간 : 2019. 6. 3. ~ 2019.11.20.

○ 계 약 일 : 2019. 5. 31.

○ 계약금액 : *************

○ 계 약 자 : **************

○ 주요공종 계약내역

- 조류차단막 설치·철거 320m, 오일휀스 설치·철거 400m

□ 설계변경 주요사항

○ 계약물량의 신규공정 발생

신규공정	당초	변경	사유
******	*	***	*****************
*****	*	*******	*****************

- 사급자재(조류차단막 및 오일휀스) 정산내역

품 명	단위	구매수량	사용량	재고량	보관장소
조류차단막	m	**	**	**	********************
오일휀스	m	***	**	**

○ 법령에 따른 제경비 항목 감(4항목) 발생

- 건강보험료, 연금보험료, 노인장기요양보험료,산업안전보건관리비

□ 설계변경 금액

구 분	금액		증·감	비 고
	당초	변경
도급비	**********	**********	**********	****** *******

□ 주요 변경내역

○ 주요공종 물량에 따른 순공사비 증액내역

연번	공 종	금액		증·감	내 용
		당초	변경
1	폐기물운반 처리	*	*********	*********	******************액
2	고재	*	**********	**********
계	폐기물+고재		*********	*********

○ 제경비 등 법령에 따른 비용 감액내역

연번	공 종	금액		증·감	내 용
		당초	변경
1	건강보험료	*******	*	*******	********
2	연금보험료	*********	*	*********
3	노인장기요양보험	******	*	******
4	산업안전 보건관리비	*********	*	*********
5	일반관리비	*********	*********	*******	**********
6	이윤	*********	*********	*******	*************

□ 조치계획

○ 상기 변경내용에 대해 자체 설계변경 심의위원회를 개최하고 심의 결과에 따라 설계변경 시행

붙임 : 1. 설계변경내역서 1부.

2. 계약금액 조정 검증확인서(기술심사담당관) 1부.

3. 고용산재완납증명서 1부. 끝.