문서번호	역사문화재과-21310
결재일자	2019.11.18.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		문화재사업팀장	역사문화재과장
한기민		노은영	11/18 代김지혜
협조

의정부 터 유구 임시보존처리 및 주변정비

공사 시행계획

2019. 11.

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	□	■
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사 등	■	□	2019.9.6. 자문회의 의견 반영
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 분석 등	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등	□	■
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	□	■
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	□	■
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등	□	■
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	□	■
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	□	■

의정부 터 유구 임시보존처리 및 주변정비

공사 시행계획

의정부 장기간 유구노출(발굴조사:`16.~`19.)로 인해, 손상되고 있는 유구의 보호·관리를 위하여 임시보존처리 및 주변정비 공사를 시행하고자 함.

1		추진 배경

□ 추진 근거

○『문화재보호법』제4조(국가와 지방자치단체 등의 책무)

○『매장문화재 보호 및 조사에 관한 법률』제28조(매장문화재의 기록 작성 등)

□ 추진 경위

○ `16. 7.~`19. 8. : 의정부 터 1~4차 발굴조사

○ `19. 9. 6. : 의정부 터 유구 임시보존처리 자문회의

- 유구 훼손되지 않도록 임시보존 처리하고 여타의 행위 최소화

○ `19. 9.17. : 의정부 터 발굴완료 조치 통보(문화재청)

- 정비계획 수립 추진, 발굴현장 안전관리 철저

○ `19. 9.19. : 의정부 터 유구 임시보존처리 2차 자문회의

- 임시보존처리 외 폐기물 처리, 복토, 펜스 보수, 유지·관리 등 추가 필요

○ `19. 9.~10. : 의정부 터 유구 임시보존처리 및 주변정비 설계용역

- 과업 : 설계 내역서 및 설계 도면, 용역 주요내용 설명서(시방서)

□ 사업 필요성

○ 의정부 터 발굴조사로 인한 수년간의 노출로 유구 손상 심각

○ 발굴조사완료에 따른 유지·관리 주체 필요

○ 펜스 보수 등 안전을 위한 주변 정비 필요

Ⅱ		사업 개요

□ 사업대상 : 의정부 터 발굴현장

○ 지  번 : 서울시 종로구 세종로 76-14 등 6필지

□ 사업기간 : 착수일로부터 ~ 1년

□ 사업내용 : 의정부 터 유구 임시보존처리 및 주변정비

○ 의정부 터 발굴 유구 보존유구 사전조사 및 임시보존조치 보고서

○ 표면토양정리 후 다지기, 석부재 보존경화처리

○ 안전을 위한 깊게 제토한 구간 복토

○ 보존유구 점검 및 유지관리

- 노후화된 펜스 보수(랩핑, 투시창 확장), 안내판 재설치

Ⅲ		계약 개요

□ 입찰 방법 : 제한경쟁 입찰

○ 제한 방법 : 기술보유상황, 실적제한

- 기술보유상황 :「문화재 수리 등에 관한 법률」 제14조에 의거 전문문화재수리업(보존과학) 등록 업체

**********************************************************************

***************************************************************

□ 낙찰자 결정방법 : 적격심사(계약부서)

가 격 입 찰

적격심사대상자 선정(1순위)

이 행 능 력

(이행실적, 기술능력, 재무상태 등)

⇒ 적격심사 결과 종합평점이 적격통과점수 이상이면 낙찰자로 결정

Ⅳ		행정 사항

□ 소요 예산 : *****************

********************************************************************

□ 향후 계획

○ `19. 11월 : 의정부 터 임시보존처리 계약 의뢰(역사문화재과)

○ `19. 11월 : 의정부 터 계약 입찰 및 낙찰(재무과)

○ `19. 12월~`20. 12월 : 의정부 터 유구 문화재 수리 추진(계약업체)

붙임 1. 과업내용서  1부.

2. 특기시방서  1부.

3. 설계설명서  1부. 끝.